함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(2014년 동작 영등포구관내 시설물)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경(제2회) 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 자 : 천윤건설 대표 정수철

다. 계약기간 : 2014. 4. 14 ~ 2015. 4. 30.

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 사유 : 공사현장에 적합한 시공에 따른 물량 증감 및 신규공종 발생

- 제수밸브 부설 및 접합공 물량증감 발생

- 부단수 제수밸브 설치외 14개 신규공종 발생

바. 설계변경 내역                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
공급가액	602,774,819	602,774,819	증감없음
부가가치세	60,277,481	60,277,481	-
도 급 액	663,052,300	663,052,300	-

붙 임 1. 설계변경시행품의 및 설계변경내역서 각 1부.

2. 설계변경 심의의결서, 합의서 제비율 검증표 각 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이승영		주무관	김태식		시설관리과장	11/26 우종근
협조자
시행	시설관리과-26650	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4599	/전송		/		/	대시민공개