함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	시설과장
(경유)
제 목	공사변경계약체결통보-암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

1. 시설과-6983(2014.11.25)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『강북정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』에 대한 변경계약이 아래와 같이 체결되었으니, 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 계약자 : 대보건설(주)

나. 공사기간 : 변경없음

전체분  2010.02.18. ~ 2014.11.25.

5차분  2014.01.14. ~ 2014.11.25.

다. 계약금액 : 금356,104,800원 감액

전체분 변경전 금55,368,948,800원

전체분 변경후 금55,012,844,000원

5차분 변경전  금9,921,948,800원

5차분 변경후  금9,565,844,000원

라. 계약변경 사유

- 공사내역 변경 및 보험료 정산

붙임 : 1. 계약변경체결통보서 1부. 끝.

	재무회계과장
주무관	김미정		재무회계과장	11/26 조두업
협조자
시행	재무회계과-15292	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1233	/전송	02)3146-1209	/		/	부분공개(7)