의원 요구 자료 제출

시 행	치수과-2224
결재일자	2013.7.1.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		치수과장	시설부장	한강사업본부장		결재
권혁정		김종득	김만수	07/01 한국영
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1344번, 곽재웅의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

곽재웅 의원( 도시계획관리위원회, 민주당)

□ 요구번호 : 1344번

- 성동구 옥수동 옥수나들목 공사진행 월별 현황 및 예산집행현황

□ 옥수나들목 사업개요

○  공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수동) - 장기계속

○  위    치 : 성동구 옥수동 옥수역 인근

○  사업규모

- 보행자전용 나들목 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 69.8m

- 이중육갑문(수문) 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m

○ 사 업 비 : 4,495백만원 (공사비 3,493, 관급자재 852, 이설비 150)

○  사업기간 : 2013. 4. 19 ～ 2015. 9. 30

□ 사업추진현황

○ 2013. 3. 19 : 공사 발주

○ 2013. 4. 15 : 공사 계약

○ 2013. 4. 19 : 공사 착수

○ 2013. 5 ~ 6 : 유관기관 협의

- 한국철도공사, 한국철도시설공단, 성동구청 등과 중앙선 옥수역 하부 철도부지(성동제설기지), 두무개길 철도부지 점용에 관하여 협의 중에 있으며,

- KT, 한국전력공사 등과 지장물 이설에 관하여 협의 중에 있음

□ 추진계획

○ 옥수나들목 신설공사는 제방을 개착하여 시행되는 공사로 우기 공사 시 제방 범람의 문제가 있어, 우기 이전 유관기관 협의를 완료하고,

○ 금년 우기 이후(10월부터) 공사를 시행하고자 함

□ 예산집행현황 (정상추진중) - ’13년 예산 1,300백만원

○ 2013. 4. 15 : 공사 계약

- 시 공 사 : 신성월드건업(주)

- 계약금액 : 총액 3,493백만원, ’13년 1,200백만원

※ 금년예산 1,300백만원 중 100백만원은 7월 중 관급자재 구매 예정. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 한강사업본부 (치 수 과)	담당사무관	김 종 득
	☎ 3780-0683	주무관	권 혁 정
	작 성 일 : 2013. 6. 26