함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경계약체결 보고(통보)(토목,건축시설물 유지보수공사)

1. 정수시설과-8099(2014.11.24)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경계약 내역

계약건명	계약금액(원)	변경계약체결일	변경사항	사 유
토목,건축시설물 유지보수공사	23,183,110	2014.11.26	계약금액변경 35,555,120원→ 23,183,110원	○ 수로관설치 (86본에서 27본으로 59본 감) ○ 전동셧터보수 (1개소에서 2개소로 1개소 증) ○건강, 연금보험료 미납 감액(348,762감)

따로붙임 : 1. 변경계약서 및 합의서 각 1부

2. 계약보증금 지급각서 및 내역서 각 1부.   끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김은경		행정관리과장	안창수		영등포아리수정수센터소장	11/26 임정규
협조자
시행	행정관리과-8879	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	archiyou@seoul.go.kr	/	부분공개(7)