투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「소규모 생물서식공간 조성사업」 공사기간 연장 시행

서울대공원「소규모 생물서식공간 조성사업』에 대하여 아래와 같이 공사기간 연장 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 소규모 생물서식공간 조성사업

나. 위   치  : 산림욕장내 아까시아숲 등 2개소

다. 사업내용 : 생태연못조성, 초화류 및 수생식물 식재 등

라. 도 급 자 : ㈜장위건설 대표 유용수

마. 계약금액 : 금135,086천원

바. 공사기간 연장

○ 당   초 : 2014.10.17 ~ 2014.12.02.

○ 변   경 : 2014.10.17 ~ 2014.12.21.(20일 연장)

사. 연장사유

○ 공원 특성상 공휴일 공사중단(공사차량 및 자재반입 제한 등)과 산악지형에 따른 자재운반(조경석 등) 시일소요 등으로 절대공기가 부족한 상태이므로 공사품질 확보를 위하여 부득이 준공기한을 연기코자 함.

아. 예산과목

○ 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물보호,

야생동식물보호사업, 소규모생물서식공간조성, 시설비

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

주무관	오맹렬		주무관	강금완		조경과장	이성주		관리부장	11/26 정상택
협조자
시행	조경과-6230	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개