문서번호	수도박물관-2832
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	수도박물관장	뚝도아리수정수센터소장
정인종	서동석	11/26 김동기
협 조
	주무관			代정인종

제6회 수도박물관 기획전 전시공간 조성 용역

준 공 기 한  연 기 보 고

2014. 11.

뚝도아리수정수센터

(수도박물관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	박물관미술관진흥법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 ■
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	타기관 자료 협조	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제6회 수도박물관 기획전 전시공간 조성 용역

준 공 기 한  연 기 보 고

우리 정수센터의 「제6회 수도박물관 기획전 전시공간 조성 용역」과 관련하여 전시공간 내부 구조물 제작 ․ 설치 및 그래픽 디자인 작업에 보다  내실을 기하기 위해 준공 기한을 연기하고자 함.

Ⅰ	ㅡ	사업 개요

용 역 명 : 제6회 수도박물관 기획전 전시공간 조성 용역

용역개요 : 수도박물관 별관 내부 구조물 제작 ․ 설치, 그래픽 공사 등

계약금액 : 금42,397,650원

계약기간 : 2014.11.24. ~ 2014.12.1.

Ⅱ	ㅡ	변경 사유

전시공간 내부 구조물 제작 ․ 설치와 관련하여 기존 벽체 중 철거가 어려운

구간의 작업 소요시간이 당초 예상보다 늘어남.

전시 그래픽 제작 ․ 설치와 관련하여 디자인 작업의 내실을 기하기 위해

에

작업기간이 더 필요함.

준공기한 변경 : 당초 2014.12.1. → 변경 2014.12.8.

에

Ⅲ	ㅡ	행정사항

해당업체 합의서 징구 및 계약부서에 통보하여 계약내역을 변경함.

□ 준공기한 원안 : 2014.12.1.

변경 : 2014.12.8.

□ 귀책소재 및 사유 : 우리 정수센터 (타 공사와 연계 진행을 위한 연기)

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 업체 합의서 (준공기한 연기) 1부.  끝.