투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사 변경 시행 계약(2014년 노후포장도로 정비공사(2구역)

우리사업소에서 시행중에 있는 『2014년 노후포장도로 정비공사(2구역)』에 대하여 다음과 같이 변경계약코자 합니다.

가. 공사명 : 2014년 노후포장도로 정비공사(2구역)

나. 도급자 : 두광건설(주) 대표 권재섭

다. 변경내용

1) 준공기한

- 당초 : 2014.5.29.~ 2014.11.28

- 변경 : 2014.5.29.~ 2014.12.31

2) 도급비 : 금890,880,130원(변동없음)

라. 변경사유 : 하반기 예산 추가 재배정에 따른 포장공사지연

(귀책사유:성동도로사업소)

붙임  1) 준공기한연기 검토보고서 1부.

2) 합의각서 1부. 끝,

주무관	하승환		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	11/26 代홍영두
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5259	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개