문서번호	시설관리과-18673
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
황대룡	송종범	11/27 이계환
협 조

용역 설계변경(정산) 보고

명에 의거 배수지 항청소 용역에 개한 감독업무를 수행중 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 11. 27

보고자 : 지방시설주사보 황대룡

1. 현황

가. 용 역 명 : 2014년 길동배수지외 2개소 항 청소 용역

나. 용역기간 : 2014. 04. 01~ 2014. 12. 31

다. 용역개요 : 청소면적-92,636㎡, 소독 세정제 청소-17,152㎡

라. 도 급 액 : 83,189,000원

마. 도 급 자 : 태화종합건설(주)  대표 김장원

2. 보고내용

가. 설계변경 사유

○ 국민건강보험 및 국민연금 보험료 실정산에 따른 용역비 감소

나. 용역비 변경 현황                                          (단위 : 원)

구분		당초	변경	비고(증,감)
총용역비		83,189,000	77,330,000	감) 5,859,000
용역비	공급가액	75,626,364	70,300,000	감) 5,326,364
	부가가치세	7,562,636	7,030,000	감) 532,636
	계	83,189,000	77,330,000	감) 5,859,000

3. 조치의견

상기와 같은 실정으로 설계변경에 대한 타당성을 심의위원회를 개최하여 심의       결과에 따라 설계변경을 시행코자함.

붙  임 : 변경내역서 및 제경비 등 증빙서류 1부.  끝.