문서번호	어린이병원원무과-16248
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	원무과장
이경주		김길권	11/27 김석태
협조

설계변경 검토보고

(치과 및 건강검진실 이전 개보수공사)

2014. 11

서울특별시 어린이병원

(원무과)

치과 및 건강검진실 이전 리모델링공사

우리병원 치과 및 건강검진실 이전 리모델링공사 시행중 아래와 같이 진료부, 간호부 추가공사 요청과 시공자 설계변경 요청 사항이 있어 그 내용을 검토하고 보고합니다

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 치과 및 건강검진실 이전 리모델링 공사

○ 공사위치 : 서초구 내곡동 6-7

○ 시 공 자 : 한일원시스템

○ 도 급 액 : 372,657,000원

○ 공사기간 : 2014.09.24 – 2014.12.29

○ 공 정 률 : 50%

□ 보고내용

○ 간호부-10126(2014.10.10.)호 여성휴게실 설치요구

요 청 내 용	검 토 의 견	공사비
-41,42병동내 여성휴게실 설치 요구(7.8*2.3)*2개소	- 설계시 설치 공간이 부족하여 여성휴게실를 계획하지 않았으나, 간호부 공간 협조로 여성휴게실 설치 (8.8*2.3)*2개소 = 40.48㎡	+3,300,000원

○ 진료부-9619(2014.10.16.)호 추가공사요청

요 청 내용	검 토 의 견	공사비
- 5층 동관행동치료실 중간칸막이 공사 및 부모대기실 창호설치	- 공사로 인하여 공간구획이 반드시 필요 하여 중간칸막이 시공 및 창호설치	+1,000,000원
- 5층 동관행동치료실 문시공 및 창호설치	예산부족으로 설계변경 불가	-
- 5층 동관행동치료사실 창호 확장	예산부족으로 설계변경 불가	-
- 언어/인지 치료실 창호 설치	예산부족으로 설계변경 불가	-
치료사실 창호설치(복도방향)	예산부족으로 설계변경 불가	-

○ 진료부-10669(2014.11.14.)호 추가공사요청

요 청 내 용	검 토 의 견	비 고
· 진료실 2번방 창문 설치, · 진료실1,2,3 방음 · 진료실3-의사실1 방음 · 진료실3 출입문 ↔ 재활 간호사실 교체	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 의사실2 의사 책상 위 전등 설치 · 정신과장실 전등 설치 및 구멍 마감	내역포함됨 추후 시공	증감없음
· 간호사실 및 발달센터 TF실 세면대앞 거울 설치 · 놀이실 바닥 메트 설치 (난방포함)	거울설치 예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 유리파손 교체 (536병실)	내역포함됨 추후 시공	증감없음
· 작업치료실2 바닥 장판 및 방음 (복도방향) · 작업치료실2 세면대 제거 자리 마무리 · 작업치료실2 중앙부 조명 설치 · 작업치료실2 외부복도 방향 환기창 설치	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 기존 창문 옆 개폐가능 창호 설치 · 외부 복도 쪽 환기창 설치 · 키박스 설치 (언어치료실1 → 치료사실)	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 인지언어 치료실 복도 방향 환기창 설치 · 언어치료실1 세면대 → 씽크대 교체 · LED전등 교체	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 작업치료실1 창고 통로 폐쇄 · 세면대 및 거울 설치	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 출입문 시건장치	- 별도 자체 수선(방재실)	증감없음
· 심리검사실2-3,심리검사실1-놀이치료실 사이 방음 · 심리검사실3 인터넷 연결	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 음악치료실-치료사실 사이 방음 · 음악치료실3 바닥 난방 (난방필름 또는 전기장판) · 보일러 조절기 노출 → 가림문 설치	예산부족으로 설계변경 불가 보일러 조절기 가림설치	증감없음
· 치료사실 벽면 및 치료사실 내 복사실 벽면 도배 · 키박스 설치	벽면도배 시공 별도 자체 수선(방재실)	증감없음
· 창고 창문 설치	예산부족으로 설계변경 불가	증감없음
· 미술치료실 창문 블라인드, · 싱크대 앞 거울설치·천정 및 벽면 마감	예산부족으로 설계변경 불가 거울 및 천정 벽 마감 시공	증감없음

○ 시공자 설계변경 요청 HIOS 14-1111GH(2014.11.11.)

요 청 내 용	검 토 의 견	공사비
- 2층 치과, 건강검진실 천정공사 수량변경 요청 경량철공천정틀 149㎡ → 521㎡ · 기존 각실의 공간구획이 각실별로 천정이 조성되어 칸막이 변경시 연결시공 불가능 · 기존 벽체 철거, 신설시 작업구간 필요	- 기존 천정이 각실별로 천정이 조성되어 천정틀의 높이가 틀리며, 기존천정 철거 및 설비배관 작업 등에 있어서 부분 철거 및 시공이 불가능하여 2층구간 전체 철거 물량으로 조정 *경량철공천정틀 철거, 신설, 텍스등 물량변경 149㎡ → 521㎡ - 철거후 경량철골천정틀 달대 등 사용 가능 부분은 현장상황에 따라 정산	+15,000,000원
폐기물처리비용 단가조정 56.3톤* 27,731원=1,561,000원 기존 폐기물처리비용 단가조정 56.3톤* 266,000원(정부고시단가)=14,975,000원 으로 요청	설계변경 불가 상기단가는 공사비 예정단가를 산정하기 위한 기초금액이며, 계약단가는 시공자가 작성한 산출내역서 단가로 조정 불가	-0

□ 조치의견

0 상기와 같이 설계변경 처리코자하며 시공자에게는 선 시공토록 지시하고, 공사비 증액분에 대하여는 추후 정산처리코자 합니다. 끝.