보고서(급수공사연기)

★주무관	주무관	급수운영과장		결재
강재성	김광운	11/27 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-29539

2014년 성동구 상수도공사 감독업무 수행중 ********** 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

보고자 :  ************

공사현황 : 2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	**************	***	‘14. 11.24 ~ 11.28	신설131

연기요청사항

연번	주소	수요가명	요청인	연기 기간	연기요청 사유
1	**************	***	***	‘14.12.12	수요가 연기요청 (신축현장 건축공사로 지장이 있어 수요가 연기요청)

검토결과

- 상기 위치에 대하여 급수공사 시행하려 하였으나 수요가 사정으로, 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	**************	***	‘14.11.24 ∼ ’14.11.28	‘14.11.24 ∼ ’14.12.12

첨 부 : 공사연기 요청서 1부(별도첨부). 끝.