	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	원인행위 변경 요청(돈화문 국악예술당 건립공사)

우리 본부에서 시행 중인 『돈화문 국악예술당 건립공사』의 ‘13년 사고이월 예산이 선행공정 지연으로 예산집행이 불가하여 예산의 효율적인 집행을 위하여 아래와 같이 조정하여 원인행위변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 예산 재배정 내역

구 분	배 정 일	재배정액(원)	원인행위액(원)	비 고
‘13년 사고이월 예산	‘14.03.27	250,000,000	250,000,000
당해 예산	‘14.03.03	670,000,000	430,388,460	잔액 239,611,540원 도급공사 2차수 계약 (기계설비, 전기,통신)

2. 원인행위 변경

계 약 건 명		당 초		변 경
		사고이월	14년예산	사고이월	14년예산
도급공사	돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사(1차)	100,000,000		70,000,000	30,000,000
	돈화문 국악예술당 건립 전기공사(1차)	100,000,000		70,000,000	30,000,000
	돈화문 국악예술당 건립 통신공사(1차)	50,000,000		35,000,000	15,000,000
관급자재	국악예술당 건립 지열히트펌프시스템 (설비) 구매설치		192,472,070	75,000,000	117,472,070
	자동제어설비 구매설치 (국악예술당건립 기계설비공사)		153,412,080		153,412,080
	돈화문 국악예술당 건립공사 수배전반 구매		57,074,320		57,074,320
	돈화문 국악예술당 건립공사 디젤발전기 구매		2,7429,990		2,7429,990

3. 예산과목 : 문화관광디자인본부 문화정책과/문화도시 서울구현/

문화기반시설조성/ 돈화문로 전통문화시설 건립/시설비. 끝.

	설비부장
★주무관	유영선		시책사업과장	代김원태		설비부장	11/27 박기형
협조자	주무관	박경철
시행	설비부-13413	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15, 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개