문서번호	도로보수과-10626
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		11/27 이규철
협 조
	주무관		代김영용

서강로 교통사망사고 지점

개선사업 시행계획 보고

2014.  11. 27(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

서강로 교통사망사고 지점

개선사업 시행계획 보고

2014. 9. 17 마포구 서강로 상에서 발생한 교통사망사고 지점에 중앙분리대를 설치하여 보행자 무단횡단 등 교통안전사고를 예방코자함.

☞ 관련근거 : 교통운영과-21796(2014.11.19.)호와 관련임.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 도로교통 소통개선사업

○ 위    치 : 마포구 서강로 124 앞 도로

○ 개선내용 : 중앙분리대, 충격흡수장치 설치 등(70m)

○ 예산배정액 : 17,000,000원

□ 보고내용

○ 서강로 교통사망사고 지점 교통안전시설물 개선공사 건에 대하여 교통개선사업 시행

- 중앙분리대 설치(SB4등급)   : 22경간

- 충격흡수장치 설치(CC1등급) :  2개

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지의 계약기간 소요 및 동절기 이전에 공사를 완료하여야 하므로 별도 발주시행은 곤란하여  2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사에 포함하여 시행하고 추후 정산 설계변경 시행.

- 필요금액 : 약 3,701,000원

- 도급 공종 및 물량

▸ 중앙분리대 설치(SB4등급) : 70m(22경간)

▸ 충격흡수장치(CCS60) 설치 : 2개

○ 관급자재 사용 검토

- 중앙분리대 관급자재는 조달구매로 설치완료하고 추후 정산.

▸ 중앙분리대 관급구매 : 7,868,260원(수수료 포함)

▸ 충격흡수시설 관급구매(현장설치도) : 6,635,640원(수수료 포함)

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	예산배정액	교통부속물 (합계)	도급비	관급비	잔액
교통소통개선사업	17,000	18,205	3,701	14,504	- 1,205

※ 공사부족금액은 기 배정되어 공사 완료한 교통소통개선사업 집행 잔액 사용

□ 향후계획

○ 2014. 11. 27 : 관급자재 구매 의뢰

○ 2014. 11. 28 : 유지보수공사 작업지시

○ 2014. 12. 20 : 개선공사 완료

○ 2014. 12. 22 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과 보고

붙 임 : 1. 제8차 작업지시 설계내역서 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝 끝.