문서번호	총무과-10967
결재일자	2013.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	총무부장	한강사업본부장
주병준	김영기	정진일	07/12 한국영

한강 행복몽땅 프로젝트 추진상황 보고

2013.7.11(목)

한강사업본부

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	시민참여행사 개최	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가 자문 시행	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 행사참여	)	무 □
	●	기업	:	유 ■	(	민간업체 참여	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	주요 시설물 설치 협의	)	무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 참여 협의	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	문화재단 협의	)	무 □

한강 행복몽땅 프로젝트」추진상황 보고

프로젝트 개막(7.20)대비 추진상황 점검 등 주요 준비 상황 및 홍보계획을 보고 드림

Ⅰ		추진상황 점검

□ 점검결과

○ 30개 사업 중 28개 사업은 정상추진 중(7.15일까지 완료 예정)

○ 다만, 낚시데크 조성은 설계변경 등으로 프로젝트 기간 중 활용이 곤란할 것으로 판단되며, MBC 아리랑 콘서트는 주최즉 사정으로 취소됨

		< 공 정 율 >
■ 정 상(28개) : 공정율 평균 90% ■ 지 연 (1개) : 낚시데크(부유식 보완 설계변경 및 국토부 등 협의 지연) ■ 취 소 (1개) : MBC 콘서트(7.5, 담당 PD 교체 등 내부사정으로 취소 통보)

□ 주요사업 추진상황

① 완 료		6개 사업(교량하부 휴게공간 등)

○ 씨름장(2개소, 6.24), 교량하부 휴게공간(14개소, 7.3), 수영장(6.28 개장), 터널분수(6.28 개장), 강변 쉼터(3개소, 7.1), 레저스포츠 체험(운영 중)

② 85% 이상		22개 사업(그늘쉼터 조성 등)

○ 캠핑장

- 예약률(51%), 근무조 편성(7.4), 상하수도 등 공사(7.10), 텐트 설치(7.17), 편의시설 보강공사(운영업체, ~ 7.15)

○ 그늘쉼터 조성(20개소) : 바닥 마무리 공사 중(7.12 완공)

○ 강변테마놀이터(이촌) : 마무리 공사 중(7.15 완공)

○ 명화상영(9개소) : 페이스북을 통한 교량하부 상영작 선정(‘괴물’, ‘말아톤’ 등)

○ 빅게임(4회)     : 퀴즈 및 운영계획 수립, 시민참여 모집 중(7.1 ~ 7.20)

③ 지연사업		낚시데크 조성(설계 중)

○ 국토부 협의 등 설계보완 지연, 설계완료(7.22), 착공(8.20)

Ⅱ		질서 및 안전대책

□ 상황실 운영

○ 종합상황실 : 본부 2층(소회의실, 6.20)

- 비상조치 계획, 보고 등 상황관리 총괄

○ 현장상황실 : 13개소(안내센터 11개소, 캠핑장 2개소)

- 행사 안내 및 현장 질서유지, 안전사고 예방 등 현장 상황 대처

○ 행사지원반 : 시설설치, 주차‧교통, 수상안전, 홍보분야 등으로 구성

- 사업별 시설물 조성, 행사개최 지원 등

□ 안전 및 사고예방

○ 현장상황실 : 캠핑장(2), 안내센터(11)

- 행사현장, 공원내 시설물 수시 순찰 및 시설물 점검

○ 현장점검반 : 총 4개조, 연인원 492명

- 캠핑장(24시간), 수영장 질서유지 및 안전사고 예방 점검

○ 의료지원반 : 수영장, 수상행사장 등 주요 행사장

- 응급진료소(구급약, 의료진 배치) 운영, 구급차량, 소방차 대기 등

○ 긴급구조반

- 119수난구조대(소방방재본부), 한강경찰대(서울경찰청) 긴급 후송 등 지원

○ 야간 돌발상황 대비

- 비상시 대피로 등 관람객 개별행동요령 안내문 게시 및 배포(캠핑장, 영화관 등)

- 행사장비, 시설 등 안전점검(수상무대, 영화상영 차량 등)

- 야간 특별근무조 편성 운영(캠핑장, 영화상영, 배다리 행사 등)

※ 배다리 행사시 설치부교 안전관리는 국방부와 협의 추진

<주요 야간행사>

연번	사 업 명	장소	일정	행사시간
1	명화상영	물빛무대, 교량하부 등 9개소	매주 금, 토	20:00 ~ 22:00
2	수상음악회	물빛무대	수, 금, 토, 일	19:00 ~ 22:00
3	배다리 강건너기	양화~선유도	8.8~8.12	10:00 ~ 22:00
4	별보기체험	뚝섬, 동작	매일	14:00 ~ 22:00

□ 주차장 확보 : 7,512 ⇒ 9,472(1,960면 추가)

□ 여의도, 광나루 등 캠핑장, 수영장 주변 집중 확보

□ 불법 주‧정차 및 질서유지 인력 배치 및 현장점검(주차운영업체, 현장상황실)

□ 쾌적한 환경 조성

□ 캠핑장 등 임시화장실 설치 : 139 ⇒ 141개소(2개소 추가)

□ 주요행사장 쓰레기통 설치 : 140 ⇒ 190개소(50개소 추가)

□ 공원청소 : 24시간 청소체계 유지(필요시 인력 추가투입)

※ 캠핑장 등 행사장 참여객들이 발생한 쓰레기를 스스로 처리하는 캠페인 실시

□ 풍수해 대책

□ 캠핑장, 수영장 출입통제, 이용시민 안내(수방 관련부서와 유기적 협조)

□ 야외무대, 그늘막, 분수 등 공원시설물 안전성 점검

□ 안내센터별 시설물 순찰, 점검 및 대피안내

※ 호우주의보, 팔당 방류량 3천㎥/sec 시 수방체제 돌입 :「수방메뉴얼」에 따라 조치

□ 우천시 행사 취소, 연기 등 변경사항 안내

□ 행사계획 변경 안내 및 변경시 신속 안내 - 인터넷, SNS, 교통방송 등

□ 행사 취소시 신속 대피 유도 - 현장상황실, 현장점검반

Ⅲ		홍보계획

□ 홍보방향

○ 시기별로 차별화된 전략으로 효율적 홍보 추진

○ 온·오프라인 시정 홍보매체 활용 극대화

○ 행사 주최 민간단체 및 후원기업 매체와의 연계성 강화

<단계별 전략>

단계	홍보일시	홍보컨셉	홍보전략
1단계	6월	이미지 홍보	○ 1차 종합보도자료 제공 ○ 세부사업별 보도자료 제공 ○ 온라인(SNS) 홍보
2단계	7~8월	시민참여 유도 홍보	○ 포스터․리플릿 등 홍보물 제작 및 배포 ○ 프로젝트 시작 전, 2차 종합보도자료 제공 ○ 잡지․방송 타깃별 맞춤형 기사 제공
3단계	9월	행사이미지 강화 홍보	○ 온․오프라인 시민만족도 조사 ○ 행사후기 등 만족도 노출

□ 그 간의 주요 보도실적

○ 보도전략

- 테마별, 시기별로 신속한 보도자료 제공으로 적기 보도

- 부서별, 사업별 보도계획 수립 추진

- 각 부장 책임 하에 주요 신문‧방송을 직접 접촉, 담당 사업 기획 보도 추진

○ 보도건수

□ 매체별 보도건수

(단위 : 건수)

총계	신 문					방 송					잡지	기타
	소계	동아	조선	한겨레	기타	소계	MBC	SBS	YTN	기타
147	39	5	3	3	28	24	4	3	4	13	11	73

□ 보도내용별 건수

(단위 : 건수)

총계	종합	개별사업
		소계	캠핑장	수영장	씨름장	명화상영	생태프로그램
147	36	111	37	49	6	14	5

□ 향후계획

○ 언론 홍보 : 수시추진

- 보도자료 배포(7.16일자 종합 2차, 각 사업별 보도자료)

※ 캠핑장, 명화상영 등 테마별 신문, 방송, 잡지 등 기획특집 추진

<기획보도 추진계획>

보도 순서	보도대상	보도일시	매체	보 도 내 용	홍보 책임자
1	수영장‧ 물놀이장	7월 중	조선일보	▪수영장 및 물놀이장 인기리에 운영 ▪잠실수영장 내 터널분수 운영	공원부장
2	교량하부 휴게공간	7월중	한계레신문 등	▪교량하부 휴게공간 공사 완료 ▪시설물 조성내역, 위치 및 이용방법 안내	공원부장
3	캠핑장운영	7월중	한계레신문 등	▪여름 캠핑장 운영, 부대 프로그램 소개 등	운영부장
4	명화상영	7월 중	동아일보 등	▪영화상영 일정 및 작품안내 ▪다리 밑 영화제 시민선호도 조사 결과	총무부장

※ 각 부장이 책임자가 되어 담당기자 접촉, 홍보전략 및 방법, 일시 등 협의

○ 인쇄홍보물 : 7. 8 ~

- 행사안내 프로그램북(7만부), 포스터(3천부) 배포

□ 공원 안내센터, 본청, 자치구, 관광안내소(15개소), 지하철, 블랙야크 매장 등

○ 옥외홍보물 : 7. 8 ~

- 지하철 모서리 광고(5~8호선, 1,256면, 7.8~) : “우리는 한강으로 피서간다”

- 시내 전광판(7.26~)

- 자치구 소식지, 전광판, 게시판 등 각종 매체

○ 온라인홍보 : 수시추진

-「한강몽땅 WOW 미션」사진‧영상 공모 이벤트(7.20~8.20, 뉴미디어 담당관 협조)

-「다리밑 영화제」: 페이스북 선호도 조사를 통한 상영작 선정 홍보(‘괴물’, ‘말아톤’ 등)

-「한강 여름 캠핑장」홈페이지(www.hangangcamping.co.kr) 접수 및 홍보

- SNS(트워터, 페이스북, 미투데이), 웹사이트(‘서울톡톡’, WOW서울, 라이브서울) 등

※ 시민소통기획관 협조

○ 민간단체 등

- 블랙야크 등 행사 주관 단체‧업체(홈페이지 등)를 통한 홍보

- 문화행사 참여 민간단체(서울시 나눔재단 봉사단 등)를 통한 홍보

□ 협조사항(시민소통기획관)

○ 전광판 광고, 현수막 제작․설치, 온라인 홍보 적극 지원

Ⅳ		향후계획

○ 캠핑장 등 테마별 신문, 방송 등 기획특집 추진	: 7월중

○ 상황실 등 근무메뉴얼 교육	: 7. 8~7.12

○ 프로젝트 시설점검, 상황연습 등 최종점검	: 7.15~7.18

○ 프로젝트 행사개최	: 7.20~8.20

※ 별 첨 : 홍보 세부추진내용

별첨

홍보 세부 추진내용

연번	홍보방법		내 용	추진일정	추진결과	협조부서 등
1	언론 홍보	보도 자료	○1차 : 캠핑장, 빅게임, 명화상영 등 프로젝트 주요 프로그램 소개 (종합보도)	6.3(월)	완료	언론담당관
			○2차 : 한강 여름 캠핑장 예약 접수	6.14(금)	완료
			○3차 : 밤섬 람사르습지 지정관련 생태체험 프로그램 등	6.20(목)	완료
			○4차 : 한강 야외씨름장 개장	6.21(금)	완료
			○5차 : 수영장 개장(터널분수 포함)	6.26(수)	완료
			○6차 : 한강 명화상영	6.28(금)	완료
			○7차 : 광진교 8번가 전시 및 공연	6.29(토)	완료
		신문‧방송 보도	○주요 언론 기획보도 추진 - 동아일보 등 주요매체에 테마별 홍보 진행	5.30~ 8.20	추진중	언론담당관
		잡지	○월간 여성지 등 게재(7월호, 8월호) - <퀸>, <레몬트리>, <babee> 등 7월호 게재	6.10, 7.10	추진중	시민소통담당관
			○시정홍보물 : 서울사랑(7,8월),내친구서울(7,8월) - <서울사랑>, <내친구서울> 7월호 게재	6.20, 7.20	추진중	시민소통담당관
			○자치구 소식지 등 게재 (7․8월호)	6.20, 7.20	추진중	행정과

연번	홍보방법		내 용	추진일정	추진결과	협조부서 등
2	인쇄 홍보물	브로슈어	○7만부 제작 배포 - 7.8 제작완료, 배포 중	7.8 ~	추진중	시민소통담당관
		포스터	○3천부 제작 배포 - 7.8 제작완료, 배포 중
		서울시 리플릿	○서울시가 드리는 문화예술 프로그램 (7,8월호) - 7월호 게재, 8월호 게재 예정	7.14 ~	추진중	문화정책과
		대중교통	○지하철 모서리 광고(5~8호선, 1,256면)	7.8~	추진중	시민소통담당관
3	영상매체 홍보	시	○시내전광판	7.26~	추진예정	시민소통담당관 서울메트로 도시철도공사
		자치구	○자치구 옥외매체 : 각종 전광판, 각종시설 TV	수시	추진중	자치구
4	온라인 홍보	홈페이지	○한강사업본부 홈페이지 내 행사 페이지 제작, 배너, 관련사이트 링크 및 지속 홍보	7.1 ~	추진중	정보화기획담당관
			○캠핑장 전용 홈페이지를 통한 홍보 (www.hangangcamping.co.kr)	6.5 ~	추진중	캠프엔
			○웹사이트(서울톡톡, WOW서울, 라이브서울 등)	수시	추진중	뉴미디어담당관
		SNS 등	○한강 블로그 내 프로그램 홍보 (http://blog.naver.com/hangangbb)	수시	추진중	정보화기획담당관
			○트위터, 페이스북, 미투데이 취재단 지원	수시	추진중	뉴미디어담당관
			○이메일링 서비스 - 하이서울뉴스, 세종문화회관, 서울시향 등	수시	추진중	뉴미디어담당관
			○서울마니아, 해치군의 서울나들이 등	수시	추진중	뉴미디어담당관

끝.