문서번호	토목부-23498
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
홍상필	代이석우	11/27 노우성
협 조
	주무관		박근우

감리용역(4차 2회) 변경 검토보고

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

감리용역(4차 2회) 변경 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 전면책임 감리용역)

『서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사』 보조감리원(강교분야) 추가투입에 따른 책임감리 용역 변경계약 검토보고임.

□ 관련근거

◦ 한국종합 2014-11-344호(2014.11.25) 감리용역 설계변경(4차2회) 제출

◦ 토목부-20434(2014.10.21.) 상주 보조감리원 투입계획

□ 사업개요

◦ 개    요 : 고가 철거 및 재설치, 보수보강 (L=753m)

◦ 사업기간 : 전체, 2010.12 ~ 2014.12

◦ 사 업 비 : 전체, 27,300백만원 (14년 재배정 4,000백만원)

◦ 도 급 사 : ㈜흥화 외1개사

□ 용역개요

◦ 기    간 : 전체, 2010.12.31~2015.02.23 (4차,2014.01.22.~ 2015.02.03)

◦ 용 역 비 : 전체, 1,638,300천원   (4차,376,000천원)

◦ 용 역 사 : ㈜한국종합기술, 대표 이강록 외 1개사

□ 감리사 제출 내용

◦ 당초 감리용역(4차) 진행중 강교감리 추가투입에 따른 변경보고

(용역기간을 축소하여 강교 감리원 추가 투입비용 확보 : 17,200천원)

◦ 투입변경 내용(4차)                                            (단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역비(4차)	376,000,000	376,000,000
수석감리사	토목 1인	토목 1인
감리사보	토목 2인	토목 2인	안전관리감리 완료 강교감리 추가
기술지원감리원	구조,토질및기초 도로및공항, 시공	구조,토질및기초 도로및공항, 시공

□ 보고자 검토 및 조치의견

◦ 상기 감리단 보고내용 검토결과 강교전담 감리원 추가투입 계획에 따라           금회 4차분 용역기간을 축소하여 변경계약을 진행 하고자 함

◦ 4차2회 변경계약 내용                                   (단위:원)

구 분	용역비		용역기간		비 고
	당초	변경	당초	변경
용역비	376,000,000	376,000,000	‘14. 1.22. ~ ‘15. 2. 3.	‘14. 1.22. ~‘15. 1.14.

붙임 : 1) 강교감리원 추가투입계획보고 1부.

2) 감리업체 설계변경 요청서 1부.  끝.