투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구리암사대교 건설 전기공사(3차) 공사기간 연기 요청

1. 설비부-13335(2014. 11. 26.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진하고 있는 구리암사대교 건설 전기공사(3차) 준공기한을 아래와 같이 연기 요청합니다.

가. 변경내용

구 분	공사기간		비고
	변경 전	변경 후
전기공사(3차)	`13.2.28. ~ `14.11.30.	`13.2.28. ~ `14.12.31.	+31일

※ 도급금액은 변경 없음

나. 연기사유 : 토목공사인 선행공정 지연

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙 임 : 구리암사대교 건설 전기공사(3차) 공사기간 연기 검토 보고 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	김은덕		열빛총괄과장	권오식		설비부장	11/27 박기형
협조자
시행	설비부-13375	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	keund9@seoul.o.kr	/	부분공개