투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	상수도 이설 협조요청(긴급)

1. 배수과-7442(‘14.11.11)호와 관련입니다.

2. 위 호로 귀 본부에서 이설 완료 의견을 주신“천호대로(광나루역) 확장공사”2단계 구간 상수도관(A, B-LINE)중 A1(D1500mm, D900mm) 상수도관을 철거해야 하나 지속적으로 수압이 발생됨으로 인해 철거가 불가하여

3. 자체 조사결과 당초에는 없던 현재 통수중인 C-LINE과 A1 기존관 2개소(D900mm, D1350mm)가 연결돼 있는 것으로 판단되오니 이설공사 지연 등으로 인하여 현재 도로확장 공사가 지연되고 있어 공정 관리에 많은 어려움이 있음을 감안하시어 조속한 시일내에 상수도관 이설 완료될 수 있도록 대책 및 이설 공법을 2014.11.28.(금)까지 회신하여 주시고,

4. 또한 당초 계획에 없던 상수도 이설로 인해 추가 이설비용이 발생, 사업추진에 많은 어려움이 있으니 금회 철거되는 A1(D1500mm, D900mm)라인은‘15. 6월 재철거하여야 하는 점을 감안 부단수 천공(2개소, 약5억원 이상)보다는 비용이 저렴한 단수후 천공이 가능한지를 검토하여 주시고, 부득이 부단수 천공을 하여야 한다면 기존 밸브 노후로 인한 차수 불가 및 상수도관 설계도서 상이 등으로 인해 발생된 사안이므로 금회 부단수 천공 비용 일부를 귀 본부가 부담하여야 할 것으로 사료되오니 이에 대한 의견도 함께 회신하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 상수도 이설공사 현안사항 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		교량건설과장	이동훈		토목부장	11/27 노우성
협조자
시행	토목부-23389	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 별관 2동 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개