문서번호	방재시설부-12342
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	★방재시설부장
임봉규		신용우	11/27 임춘근
협조	광역도로과장		최광무
	주무관		이한규

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사(조경)

감리사 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〔방재시설부〕

『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』

감리사 실정내용 검토보고

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 관련, 보도신설구간 지장수목

이식등에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ 남부감 제14-320(2014.11.19)호

⇒ 조경공사 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1일대(개봉역앞 남부순환로)

○ 규    모 : 지하차도설치 - 폭4차로  연장 736m

남.북측 측도 - 폭2~3차로 연장 2,280m

○ 공사기간 : 2007.09.10 ~ 2015.06.30.

○ 도 급 액 : 45,946백만원 (조경786백만원)

○ 시 공 사 : (주)케이에스씨건설(60%), 대우조선해양건설(주)(40%)

○ 감 리 사 : (주)동명기술공단, (주)동일기술공사

○ 조경공사

- 수목식재 : 교목 ~ 은행나무외 4종125주, 관목 ~ 회양목외 5종51,250주

- 수목이식 : 교목 ~ 소나무외 15종 343주, 관목 ~ 철쭉외 17종6,250주

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
수목 이식등	◦ 공사 종점부 보도신설 구간 지장 수목 이식(제거) - 은행나무외 3종 20주 ◦ 개봉역앞 도로 중앙분리대 및 로터 리 녹지대에 잡초발생억제, 토사유실방 지등 을 위해 우드칲 포설 - 우드 칲(T3cm) 3,445㎡	◦ 구로구 지역주민 민원사항인 개봉역~광복교 구간 보도신설 에 따른 지장수목 이식은 필요사항 이며, 구로구 요청사항인 식재지 우드칩 포설은 수목의 건전한 생육환경 조성을 위한 것임으로 긍정 검토.

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증▽감	비고
	주요 내용	금액	주요 내용	금액
식재		-	- 우드칲 포설(T3cm)	15,508	15,508
이식	-	-	- 은행나무(B30) 2주 - 은행나무(B33) 1주 - 은행나무(B35) 1주 - 은행나무(B36) 2주	3,276	3,276
제거	-	-	아까시(B8) 1주 아까시(B11) 1주 아까시(B54) 1주 싸리나무(B4) 2주 가중나무(B34) 1주 은행나무(B36) 2주 은행나무(B37) 4주 은행나무(B38) 2주	2,482	2,482
임목 폐기물	-	-	임목폐기물 10.52t	1,052	1,052

□ 공사비 증감내역

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	0	21,267	21,267
제 경 비	0	3,030	3,030
도 급 액	0	27,885	증 27,885	부가세포함

(단위 : 천원)

Ⅴ		검토의견

○ 감리 실정내용과 같이 개봉역 ~ 광복교 구간 보도신설에 따른 지장수목

이식 및 구로구 요청사항인 식재지 우드칲 포설은 타당성 있음으로 승인하고

변경내역을 설계변경에 반영코자 함.

○ 신규단가는 협의율 적용

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를

기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액     의 100분의50으로 한다.(공사계약일반조건 제20조 제1항).

붙  임 : 내역서 1부. 끝.