문서번호	물관리정책과-9560
결재일자	2013.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	오염총량팀장	물관리정책과장		물관리정책관
박근우	윤맹진	배광환		07/16 정만근
협 조

서울시 CSOs 저류조 설치사업

타당성조사 및 기본계획 수립용역 사업대상 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 7

서울특별시 도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울시 CSOs 저류조 설치사업

타당성조사 및 기본계획 수립용역 사업대상  변경

강우시 발생하는 CSOs 적정관리로 비점오염물질 하천유입을 최소화하여 하천 수생태계보호와 수질오염총량제 목표수질달성을 위해 추진하고 있는 CSOs 저류조 설치사업의 효율성을 위해 사업대상을 변경하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사업명 : 서울시 CSOs 저류조 설치사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역

□ 사업수행자 : ㈜동명기술공단종합건축사무소, ㈜ 유신

□ 사업방법 : 건설기술용역

□ 사업기간 : 2014. 4. 3까지

□ 계약금액 : 금430,810,000원

□ 사업대상(범위) : 8개소

- 사업평가 : 2개소(새말, 가양유수지)

- 타당성조사 : 6개소(응봉, 휘경, 탄천, 잠실, 신도림, 양평유수지)

- 기본계획 : 3개소(응봉, 휘경, 탄천유수지)

Ⅱ		사업변경내용

□ 변경대상 : 기본계획 수립

- 변경전 : 응봉, 휘경, 탄천유수지

- 변경후 : 응봉, 휘경, 양평유수지

□ 변경사유

- 2단계(‘16~’19년)사업인 양평유수지는 악취발생으로 인해 인근 주민생활 불편 조기해소 필요

․ 영등포구 치수방재과-7585(‘13.4.10)호로 해당유수지 CSOs 저류조 조기설치 협조요청

․ ‘13. 6. 10(화) 현장시장실 운영결과 조기시행 결정

※ 당초 2019년 준공 예정인 사업시기를 3년 단축( 올해 타당성조사, ‘14년 설계, ‘15년 착공, ‘16년 준공)

- 1단계(‘13~’16년)사업 탄천유수지는 「국토부 행복주택 시범지구」지정에 따라 연계추진 필요

□ 변경후 사업대상 범위

(단위 : 만㎥)

구 분	연번	유수지명	시설 용량	사업범위
				사업평가	타당성조사	기본계획
소 계		8개소	31.7
시범사업 ('10 ~ '13)	1	가양(강서구)	1.1	○	-	-
	2	새말(성동구)	0.1	○	-	-
1단계 ('13 ~ '16)	3	응봉(성동구)	0.4	-	○	○
	4	휘경(동대문구)	13.3	-	○	○
	5	양평(영등포구)	4.6	-	○	○
2단계 ('16 ~ '19)	6	잠실(송파구)	3.1	-	○	-
	7	신도림(구로구)	6.9	-	○	-
	8	탄천(송파구)	2.2	-	○	-

※ 비 고

- 2단계 사업인 양평유수지를 1단계사업으로 변경하고 타당성조사 및 기본계획 수립

- 1단계 사업인 탄천유수지는 2단계사업으로 변경하여 타당성조사 실시

Ⅲ		조치사항

□ 사업변경 내용을 용역사에 통보하여 착수보고회 및 과업수행계획에 반영토록 통보

□ 탄천유수지 CSOs 저류조 설치는 「국토부 행복주택 시범사업지구」지정에 따라 협의 및 연계 추진

첨 부 : 영등포구청 관련공문 1부. 끝.