문서번호	건축부-13419
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김현지		신명승	11/11 김우성
협 조
	경리과장			허금도
	도성보존팀장			신추교
	녹색성장과장			김창균
	주무관			이재홍

「서부권 한양도성 순성안내쉼터」

조성공사 발주 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황		사업비
	부서(단체)명	협의내용
한양도성도감-8757호 (2014.9.23.)	한양도성도감	서부권 한양도성 순성안내쉼터 공사의뢰 (한양도성도감-9571호, `14.10.16.)

2014. 11

도시기반시설본부

건  축  부

「서부권 한양도성 순성안내쉼터」

조성공사 발주 시행계획

한양도성 순성로 초입에 한양도성 정보 및 쉼터를 제공하는 공간을 조성하여 순성객 편의를 도모하기 위한「서부권 한양도성 순성안내쉼터 조성공사」발주 시행계획

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서부권 한양도성 순성안내쉼터 조성공사

○ 위    치 : 종로구 사직동 산1-6(시작공원 인근 인왕산 순성길 초입부)

○ 총공사비 : 150,000천원(시설비)

○ 공사기간 : 착공일로부터 60일

○ 공사내용
- 순성안내관련 정보시설, 강구조 파고라, 계단형 벤치 등 휴게시설 설치
- 쉼터 주변 조경식재 및 조명시설 설치

2		추진경위

○ `13. 10. 23 : 한양도성 탐방안내센터 조성계획 수립

○ `14. 03. 26 : 기본계획 설계공모 당선작 선정(한양도성도감)

※ 설계자 : 조진만아키텍츠  대표 조진만

○ `14. 07. 10 : 문화재청 현상변경 허가 완료

○ `14. 10. 07 : 서부권 순성안내쉼터 실시설계 완료

○ `14. 10. 16 : 서부권 한양도성 순성안내쉼터 공사의뢰(한양도성도감→건축부)

○ `14. 11. 03 : 예산 재배정 완료

3		공 사 비

□ 총공사비 ; 149,971,000원(도급비)

구 분	총공사비(천원)		비 고
	재배정예산	발주금액
총공사비	150,000	149,971	전기분야 통합발주 -사유: 전기공사비 소액 (직접공사비 2,306천원)
건축(전기,조경포함)	150,000	149,971

□ 예산과목

- 문화관광디자인본부 한양도성도감, 한양도성 보전관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 탐방안내센터 확보, 시설비(401-01)

4		공사발주 계획

□ 입찰 및 계약방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰 (지역제한:서울시)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 전문공사를 시공하는 업종 중「철강재설치공사업」면허를 등록한 업체와 전기공사법에 의한「전기공사업」을 모두 등록한 업체로서, 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해자격을 유지하고 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 단, 자격보완을 위한 공동도급(분담이행방식) 가능하며 이 경우 대표사는 「철강재설치공사업」을 등록한 업체여야 하며 공동수급업체의 구성원수는 2개사 이내로 함

○ 현장설명 미실시

○ 낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사
- 적격심사 대상업종 : 철강재설치공사업

□ 공사기간 : 착공일로부터 60일

□ 관련규정

○ 제한경쟁 : 지방계약법 제9조 및 같은법 시행령제20조
○ 현장설명 미실시 : 지방계약법 시행령제15조제3항

○ 낙찰자 결정방법
- ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준’[안전행정부예규 제102호 `14.7.31]    제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지5>

○ 하자보증기간 : 지방계약법 시행령 제30조 별표4에 의함

4		조치 의견

○ 위 내용과 같이 철강재설치공사업(전기분야 통합발주)으로 발주코자 하며,
※ 별첨 : 입찰참가자격(전문공사업) 검토 비교

○ 강구조파고라 등 철구조물의 공장제작․현장조립이 주공종임을 감안하여 구조물의 성능 및 품질 확보를 위해 선계약, 동절기이후 공사착수하고자 함.

5		향후 추진계획

○ `14. 12. : 시공사 선정 및 공사계약

○ `15. 02. : 공사착수

○ `15. 04. : 공사완료(예정)

붙 임  1. 계약요청서 1부.
2. 공사집행계획서 1부.
3. 사업계획 방침서 1부.
4. 설계도서(공사설명서,시방서,설계도면,물량내역서). 각 1부(별첨).
5. 입찰참가자격(전문공사업) 검토비교 1부.

건 축 부   지방시설서기보(건축)   김 현 지

설 비 부   지방공업주사보(전기)   이 재 홍

끝.