문서번호	시설관리과-24256
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
유준영	문용욱	이자원		11/18 이상래
협 조	급수운영과장		代유인행
	주무관		이상무

신정4중블록 분리에 따른

유량계 이설 및 신설 계획

2014. 11

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

신정4중블록 분리에 따른

유량계 이설 및 신설 계획

우리사업소 『신정4중블록 유량계 설치』 계획에 따라 신정4중블록을 적정 규모로 분리하기 위하여 KSM-8 유량계 이설 및 유량계, 제어반을 신설코자 함.

추진근거

급수계획과-4679호(2014.07.03) : 서울시 중블록 조정계획

급수운영과-23220호(2014.09.29) : 신정4중블록 유량계 설치

현 황

유량계 현황

명 칭	위 치	관경 (mm)	유량계		제어반
			형식	교체년월	형식	설치년월
KSM-8 (신정4중블록)	구로구 고척로 22길 40	1100	초음파 (건식)	2012.03	PLC	2004.06

예산현황 : 140,000천원

- 유량계실 설치 : 37,000천원 × 2개소=74,000천원

- 유량계 및 제어반 설치 : 33,000천원 × 2개소= 66,000천원

사업개요

사업목적 : 기존 신정4중블록을 행정동에 따라 적정규모로 분리함으로써 효율적인 유수율 분석을 통해 유수율 향상에 기여

공사개요

- 유량계실 설치 2개소-급수운영과 추진 중

- 유량계 및 제어반 설치 2개소-시설관리과

중블록 분리계획(급수운영과)

구분	현 재	분리계획
	신정4중블록	신정4중블록	신정6중블록
급수구역	개봉2,3동, 오류1동 일부, 오류2동, 온수동 일부	개봉2,3동	오류1동 일부, 오류2동, 온수동 일부
급수세대 (인구수)	37,235세대 (106,542명)	21,069세대 (57,654명)	16,166세대 (48,888명)
유량계 위치	개봉동68-207앞 (남부순환로)	오류동33-160	오류동33-33
인입구경(mm)	1100	900	600

유량계 이설 및 신설 계획

기존 KSM-8(신정4중블록) 설비 중 2012년도 교체한 유량계는 재사용하여 예산을 절감하고 내용연수(8년)를 초과한 제어반은 불용 처리코자 하며,

신설에 필요한 유량계 1대 및 제어반 2대를 구매하여 설치하고 유량감시시스템을 정비하고자 함

신설 블록명	유량계 위치	관경 (mm)	이설 및 신설 계획
			유량계	제어반	유량감시시스템
신정4중블록	오류동 33-160	900	기존 KSM-8 유량계 이설	제어반 신설	시스템 정비
신정6중블록	오류동 33-33	600	유량계 신설	제어반 신설	시스템 정비

추진기간 : 2014. 11.18 ~ 12.20까지

신설 유량계 명칭 부여

서울시 “유량계 업무처리 지침”에 따라 신설 중블록 유량계 명칭 부여

☞ 사업소 영문 약자(KS) 및 중블록(MEDIUM BLOCK) 약자와 일련번호 사용

유량계 명칭 부여

중블록명	유량계 위치	관경 (mm)	유량계 명칭	비 고
신정4중블록	오류동 33-160	900	KSM-12
신정6중블록	오류동 33-33	600	KSM-13

계약방법 및 소요예산

유량계 및 제어반 구매

- 계약방법 : 조달청 제3자단가계약

- 소요예산 : 23,634천원

‧ 유량계 : 11,000천원× 1대 = 11,000천원

‧ 제어반 :  6,317천원 × 2대 = 12,643천원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

유량감시시스템 정비 용역

- 계약방법 : 전자공개수의계약(한국자동제어공업협동조합 추천)

‧ 사   유 : S/W 자료처리업무(데이터관리)는 중소기업청 중소기업자간 경쟁제품 대상으로 공고(2009.12.31)한 품목으로 유량감시시스템의 중요성을 감안하여 기존 S/W 분석, 추가 개발에 따른 기술력과 신뢰성 확보를 위하여 정보통신업 면허와 소프트웨어 사업자 등록 업체로 서울ㆍ경기 지역에 소재한 한국자동제어공업협동조합에서 추천한 5개 이상 업체를 대상으로 전자공개 수의계약 하고자 함

‧ 관련근거 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제8조제2항

- 소요예산 : 12,113천원(소프트웨어프로그램비 및 게이트웨이 교체설치 1식)

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

유량계 및 제어반 설치공사

- 계약방법 : 수의계약(2014년 전기설비 유지보수 공사업체)

‧ 사   유 : 공사금액이 소액이고, 회계년도 내에 신속히 공사를 완료하기 위해 우리사업소 전기설비 유지보수 공사업체와 수의계약하고자 함

‧ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항 5호

- 소요예산 : 약 9,900천원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

행정사항

한국자동제어공업협동조합에 유량감시시스템 정비용역 업체 추천의뢰

한전에 전기사용 신청 및 KT에 전용회선 신청

붙임 : 신정4중블록 유량계 설치(급수운영과) 1부.  끝.