투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 기간연장 승인통보(상수제1구역)

1. 항상 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 청(사)에 감사드립니다.

2. 도로보수과-8512(2014.09.23.), 상수제1구역주택재개발정비사업조합 제2014-113(2014.11.27) 호와 관련, 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 공사기간 연장요청에 대하여 아래와 같이 기간연장 승인 통보하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며 관련 부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 상수제1구역 주택재개발사업 원인자부담공사(노면표시)

나. 규제승인 : 서울지방경찰청 교통관리과-20855(2014.07.28)

다. 위    치 : 마포구 상수동 상수제1구역 주택재개발사업지 주변

라. 변경내역

구 분	관 련 업 체			공 사 기 간		원인자	비 고
	설 계	감 리	시 공	당 초	변 경
노면 표시	㈜ 트래픽스	㈜ 트래픽스	건웅신호산전㈜	2014.09.23 ~ 2014.10.31	2014.09.23 ~ 2015.03.31	상수제1구역재개발조합

마. 연기사유 : 주민 민원 및 경찰청 교통규제 재심의에 따른 공사기간 변경.

※ 공사 준공시 T-GIS(2014-0207-061)에 사전 입력되어야 준공이 가능함을 알려드리며, 원인자는 준공요청시 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항을 참조하여 요청하시기 바랍니다.

붙 임 : 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울마포경찰서장(교통과장),마포구청장(교통행정과장),상수제1구역주택재개발정비사업조합장
주무관	권세봉		도로보수과장	11/28 이규철
협조자	주무관	代김영용
시행	도로보수과-10645	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8354	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개