문서번호	도로보수과-10430
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
이화신	이석재	11/28 이승진

설계변경검토보고

(2014 도로포장공사 2구역)

2014.11

북부도로사업소

(도로보수과)

설계변경검토보고

(2014 도로포장공사 2구역)

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 2014년 도로포장공사(2구역)

나. 공사개요 : 절삭 덧씌우기 647a

다. 도 급 비 : 444,812,300원

라. 공사기간 : 2014. 6. 12 ~ 2013. 12. 31

마. 도급업체 : ㈜푸른건설   대표  권미주

2. 설계변경 사유

○ 도봉로 일반차로 및 버스전용차로 포장상태 불량 구간 추가 시공

○ 삼양로 포장상태 양호한 구간 시공 제외

3. 설계변경 금액

구 분		설 계 금 액 (원)		증, 감
		당 초 금 액	변 경 금 액
총 공 사 비		1,908,312,300	1,817,583,670	-90,728,630
도급비	공 급 가 액	404,374,819	424,200,000	19,825,181
	부가 가치세	40,437,481	42,420,000	1,982,519
	계	444,812,300	466,620,000	21,807,700
관 급 비		1,450,252,730	1,337,716,400	-112,536,330
이 전 비		13,247,270	13,247,270	0

4. 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 도로포장공사 정비물량 증․감에 따른 최종 설계변경을 시행하고 준공 처리코자 함.

따로붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.