문서번호	마곡조성담당관-5477
결재일자	2013.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관	마곡사업추진단장
마승래	임대운	하종현	07/17 서노원

- 마곡 도시개발사업 -

마곡지구내 변전소 관련 한전 면담 결과보고

2013. 7.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

마곡지구내 변전소 관련 한전 면담 결과보고

Ⅰ		회의개요

일    시 : 2013. 7. 11(목) 16:00 ~ 17:00

장    소 : 서소문별관 1동 12층(마곡사업추진단 회의실)

참 석 자 : 총 4명

- 서   울   시 : 마곡조성담당관 (담당관, 토목계획팀장)

- 한국전력공사 : 남서울개발지사 (변전개발팀 김인재 차장, 이종우 주임)

Ⅱ		회의결과

【한국전력공사】

한전에서 강서구청장 면담 실시(‘13.7.9), 강서구 의견은 현부지에 변전소를 지상형으로 건설시 인․허가 불허 예정이며, 서울시·SH공사와 협의하여 아파트 용지에서 원거리 지역의 지원시설 부지로 변경시 협조 가능 등임

부지위치를 변경하여 지상 옥내형으로 건축시에는 ‘14.12월까지 전력공급 가능

‘14.12월 이후 추가전력분 공급을 위한 임시공급설비 설치 어려움

(가양변전소 임시공급설비 추가설치 불가, 별도 임시변전소 건설시 비표준으로 장기간 소요 및 비용과다 등)

【서   울   시】

매각이 진행되고 있는 현시점에서 변전소 위치를 변경할 경우에는 인근 주민들의 또다른 민원 발생소지가 있음

마곡지구내 타위치로 이전하여 건립하는 것은 강서구, 지역주민, 산업단지 입주자 등의 동의가 전제되어야 가능함

원활한 사업추진을 위해서는 현부지에 지하화를 검토하는 방향이 적절할 것으로 보임

- 지하화 공사기간내 필요한 예상 전력수요량 파악 및 부족한 전력수요량 해결방안 모색 필요

현부지(안)과 타위치 이전(안)에 대하여 장․단점을 비교 검토하여 관련기관과 논의 필요

Ⅲ		향후계획

강서구, SH공사, 한국전력공사와 회의 개최

붙임 : 회의자료 1부(한전 작성). 끝.