문서번호	시설관리과-25044
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김근용	최양주	이자원	11/28 이상래
협 조
	급수설비팀장		유인행
	주무관		이상무
	주무관		손종백
	주무관		강은영

강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2014. 11

강서수도사업소

강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련공문 : 시설관리과-24754(2014.11.25.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서구청사거리 ~ 발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡동 1094-1 ~ 내발산동 645-1

○ 규    모 : D80~D700㎜, L=1,331m 강관용접 및 주철관 접합시공(야간)

○ 기    간 : 2014. 5. 1.~ 2014.12.10.

○ 총공사비 : 2,000백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
2,000,000	708,991	530,195	660,497	낙찰률 86.75% (100,317천원)

○ 시 공 사 : 안일건설 – 현장대리인 최봉곤

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 100%(D700㎜, L=1,325m)

공사완료

사업구간

D700㎜, L=1,260m

추가구간

L=65m

□ 예산과목

○ 구축물, (송배수관정비), 시설비및부대비(시설비)

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일   시 : 2014.11.26.(수) 15:00

○ 장   소 : 사업소 4층 회의실

○ 내   용 : 설계변경 타당성 등 검토

- 설계변경 도면 및 내역서 등 사전 심의자료 이메일 발송

○ 심의위원

- 심의위원장 : 시설관리과장

- 심의위원 : 급수운영과 시설6급 유인행, 시설6급 이상무

시설관리과 시설6급 최양주, 시설6급 손종백

- 간   사 : 시설6급 김근용

○ 심의결과 : ‘적정’(본부 설계변경 심의 결과에 따라 최종 확정)

- 토공(중복) 물량 조정 : 감)5,755,000원

- 보험료(건강,노인장기요양,연금)와 퇴직공제부금 조정 : 감)15,673,000원

□ 설계변경 내역

(단위, 원)

구 분	당 초	변 경		증 감
		시설관리공단	사업소
총 공 사 비	2,000,000,000	2,140,000,000	2,118,572,000	증) 118,572,000
도 급 비	708,991,790	917,037,000	895,609,000	증) 186,617,210
관급자재비	530,195,898	565,620,000	565,620,000	증) 35,424,102
복구비 및 기타	760,812,312	657,343,000	657,343,000	감) 103,469,312

※ 관급자재비 576백만원 예산재배정(수도자재관리센터)

□ 행정사항

○ 설계변경 심의 요청 – 본부(재무회계과)

○ 심의결과에 따라 최종 설계변경 시행 및 계약의뢰 – 본청(재무과)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경도면 1부.

3. 설계변경심의결과서 1부.

4. 공사현장 실정검토보고서 1부(zip).

5. 토공물량 및 보험료 조정내역 1부.  끝.