문서번호	보행자전거과-8894
결재일자	2013.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	자전거정책팀장	보행자전거과장		교통운영관
정화립	박병현	이원목		07/18 신상철
협 조

영등포 자전거 체험장 설치 보조금 집행계획

2013. 7.

도시교통본부

(보행자전거과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	영등포구청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

영등포 자전거 체험장 설치 보조금 집행계획

	어린이와 시민들의 안전사고 예방을 위한 종합적인 안전교육과 자전거 이용자 증가에 따른 올바른 자전거교육 활성화를 위해 자전거 체험장 시설을 위한 설치비를 지원하고자 함

Ⅰ
		추진근거

자전거이용 활성화에 관한 조례 제13조

❍ 제13조(자전거교통안전 체험교육장의 설치·운영)

① 시장은 자전거를 이용하는 학생 및 시민을 대상으로 올바른 자전거이용에 필요한 교육을 실시하기 위하여 자전거교통안전 체험교육장을 설치·운영할 수 있다.

③ 민간단체 등 시장 이외의 자가 자전거교통안전 체험교육장 및 자전거 수리센터 등의 시설을 설치·운영 하고자 할 경우에는 그 시설에 소요되는 비용을 예산의 범위 안에서 보조·융자할 수 있다.

Ⅱ
		추진현황

사업개요

❍ 사 업 명 : 어린이 자전거 교통안전 체험장 조성

❍ 위    치 : 영등포구 양화동 10-8

❍ 규    모 : 2,378㎡

❍ 공사기간 : 2013. 10. 16~2013. 12. 31.

❍ 공 사 비 : 260백만원

추진경위

❍ 2012. 5.   21. :  교통안전체험장 조성계획 수립 (영등포구)

❍ 2012.  7.  27. :  설계용역(213. 3. 22 납품)

❍ 2012.  7.  27. :  설계용역

❍ 2012.  8.   6.  :  영등포 자전거 교통안전체험장 설치 예산 검토

❍ 2012. 12. 13.  :  2013년 예산편성 (150백만원)

❍ 2013.  4.   5.  :  서울지방국토관리청 하천점용허가 신청(영등포구)

❍ 2013.  7.   9.  :  하천점용허가

자전거 교통안전 체험장 현황 (자치구 13개, 한강 2개)

연번	자치구	교육장명	소 재 지	규 모		비 고 (조성일)
				실내	실외
1	용산구	용산구 교육장	이촌동 한강대교북단	-	2,500㎡	2010. 3월
2	성동구	성동구 교육장	마장동 802-2	-	1,749㎡	2010. 5월
3	동대문구	동대문구 교육장	중랑천둔치 제3공원옆	-	2,145㎡	2010. 6월
4	중랑구	중랑구 교육장	중랑천중화체육공원	-	1,800㎡	2010.12월
5	노원구	노원달마지교통공원	중계동 500	250㎡	1,566㎡	실내:2000.6월 실외:1999.1월
6	양천구	양천교통공원	신청동 산73-4	456㎡	1,788㎡	2006. 5월
7	구로구	구로구어린이교통공원	신도림동 285-22	-	2,420㎡	2012.1월
8	강서구	강서교통공원	방화동 581-1	-	2,255㎡	2002. 9월
9	금천구	금천구 교육장	시흥동 784-8	-	805㎡	2008. 9월
10	관악구	관악구 교육장	신대방역 옆 부근	-	1,000㎡	2010. 6월
11	서초구	서초교통공원	양재동 201	120㎡	5,971㎡	2002. 4월
12	송파구	어린이안전교육관	마천동 산1-10	1,537㎡	2,753㎡	실내:2005.3월 실외:2001.6월 증축:2011.9월
13	강동구	강동구 교육장	고덕동 302	183.75㎡	1,248㎡	실내:2012.6월 실외:2010.4월
14	한강사업본부	난지 교육장	상암동 481	-	2,665㎡	2010. 6월
15	〃	광나루 교육장	천호동 483-8	-	5,000㎡	2009.12월

Ⅲ
		교부계획

보조금 지급 및 정산

❍ 영등포구에서 제출한 지출계획 및 교부신청에 의하여 영등포구 공금계좌로 입금

- 계좌번호 : 우리은행 16-01-085-00-016-3

❍ 지급된 보조금에 대해 시설완료 후 정산

❍ 집행잔액은 시수입으로 세입조치

예산사항

❍ 소요예산  : 130백만원

- 서울시와 영등포구 매칭비율  50%:50%

❍ 예산과목 : 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 자전거이용시설확충 및 관리, 자전거교통안전체험장 설치, 자치단체 자본보조금(403-01)

Ⅳ
		향후계획 및 행정사항

향후추진계획

❍ 2013. 8월 ~ 9월  :  공사계약심사 및 발주

❍ 2013. 10. 16.     :  공사착공

❍ 2013. 12월         :  공사준공

행정사항

❍ 보조금 집행시 지출기준 준수

❍  보조금 정산 보고--- 준공후 5일 이내

붙임 : 1. 위치도 및 평면도  1부

2. 공정표 1부

3. 설계서 1부,  끝.

첨부1

영등포 어린이안전체험관

❍ 위치도

❍ 평면도

첨부2

❍ 공정표

예 정 공 정 표
공 종		착수일로 부터 (75일)					비고
		15일 (’13.10.16~ 10.30)	30일 (’13.11.1∼11.15)	45일 (’13.11.16∼11.30)	60일 (’13.12.1∼12.15)	75일 (’13.12.16∼12.30)
1. 토 공
2. 포 장 공
3. 구 조 물 공
4. 부 대 공
보 할	소 계	10%	15 %	20 %	25 %	30 %	100%
	누 계	10 %	25 %	45 %	70 %	100 %	100%