투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 내용 통보(송정사근 빗물펌프장 증설공사)

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-20459호(2014.11.28)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인 「송정사근 빗물펌프장 증설공사」 하도급 변경계약(기간변경) 사항을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 변경계약 내용

공 종	구분	원도급자	하도급자	하도급기간	하도급액(원)	하도급율	비 고
수장, 목공사,시멘트 보드공사	변경 전	경동산업(주)	㈜우정 씨엔피	‘14.3.3~‘14.10.31	382,360,000	82.08%	하도급 기간변경
	변경 후			‘14.3.3~‘14.12.30	382,360,000	82.08%
조적, 미장, 타일공사	변경 전	경동산업(주)	㈜정유성 건설	‘14.3.17~‘14.10.31	118,569,000	82.05%	하도급 기간변경
	변경 후			‘14.3.17~‘14.12.30	118,569,000	82.05%

붙임 : 하도급계약 변경 검토서(감리) 및 하도급변경 통보서 각1부.  끝.

	건축부장
주무관	정재흥		의료시설과장	양기정		건축부장	11/28 김우성
협조자
시행	건축부-14281	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2617	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	부분공개(6)