설계변경 심의 의견서

대시민공개

○ 공사명 : 2014년 길동배수지외 2개소 항 청소 용역(연간단가계약)

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사보 황대룡
제출 년월일	2014. 11. 28

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2014. 11. 28(금) 10:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

이계환

11/28

이계환

타당함

위    원

주무관

이경재

이경재

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

함인석

함인석

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

담    당

주무관

황대룡

황대룡

설계변경 사유서

□ 공사 현황

○ 용 역 명 : 2014년 길동배수지외 2개소 항청소 용역(단가계약)

○ 용역개요 : 배수지청소-92,636㎡

○ 용역기간 : 2014. 04.01 ~ 2014. 12.31

○ 도 급 비 : 당초 – 83,189,000원

변경 – 77,330,000원【감)5,859,000】

○ 계약상대자 : 태화종합건설(주) 대표 김장원

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 변경

- 물량 감 : 보험료 정산

□ 설계변경 변경내용 및 의견

○ 설계변경 내용                                         (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	83,189,000	77,330,000	감) 5,859,000

○ 설계변경 의견

- 신규공종은 없으며, 실제 계약물량 증․감 사항을 반영한 사항으로 설계변경은       타당함.

따로붙임 : 설계변경내역서 1부.