투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행중인 『2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : ㈜아남공영 이성우

다. 변경내용

1) 준공기한 : 당초 2015. 2. 28(변경없음)

2) 도 급 비 : 당초 327,433,370원 → 변경 487,060,000원

라. 변경사유 : 공종별 물량 증감 및 교통운영과, 굴착복구공사 추가에 따른 설계변경

마. 예산과목

1) 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시선 도색및제거, 시설비

2) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

3) 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로흐름개선, 시설비

4) 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 도로소통개선사업, 시설비

첨부 : 설계변경(1차) 방침서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	11/28 국중진
협조자
시행	도로보수과-5301	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개