보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	남철우	代정헌석	11/28 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고(개량-39)

=======================================================================

명에 의거 금천구 지역 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고 합니다.

□ 작업지시 현황

○ 지시 번호 : 개량-39

○ 근     거 : 급수운영과 –16878(호압사 급수환경 개선공사 시행계획,2014.7.28.)

○ 주     소 : 금천구 시흥동 1020-2공

○ 지시 기간 : 2014.09.27 ~ 2014.11.28

○ 공사 개요 : 누수탐지 및 보수 33개소(내충격관 D=50mm, L=990m, 30m간격)         ○ 시공업체명: 혜솔건영

□ 보고내용

○ 상기 작업지시에 의하여 호압사 급수환경 개선을 위한 기존 배관 누수탐지 및 보수를 작업지시 하였으나, 호압사 기존 펌프의 작동이상으로 신설 가압장 가동시까지 원활한 누수탐지가 어려운 실정이나, 신설 가압장 기전설비 설치 지연으로 준공기한내 작업완료 불가능

○ 또한, 신설가압장 설치완료 후 일정기간 시험가동 시 누수여부 확인 등이 필요한 현황으로 급수공사 준공기한을 연기하여 호압사 급수환경개선공사에 만전을 기하고자 함

□ 처리의견

○ 호압사 신설 가압장 시험가동 완료시까지 작업기간 연기

- 당초 작업기간 : 2014. 9. 27. ~ 11. 28.

- 변경 작업기간 : 2014. 9. 27. ~ 12. 30.

○ 지체상금 : 미부과.  끝.