문서번호	시설관리과-29529
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	소장
최세명		代최재영	11/28 정운진
협조
	주무관		代김대용

비굴착 갱생(신기술)공법 시험시공 계획보고

(현장근무자 초과근무 및 대체근무 인정)

2014. 11.

비굴착 갱생(신기술)공법 시험시공 계획보고

『면목동 102-20~121-10호간 송배수관 정비공사(비굴착갱생-시험시공)』과 관련하여 비상근무직원의 초과근무 및 대체휴무 계획을 보고드립니다.

▢ 현    황

◯ 공 사 명 : 면목동 102-20~121-10호간 송배수관 정비공사

◯ 공사개요 : D=700mm, L=150m(비굴착갱생)

◯ 공사위치 : 중랑구 면목동 102-20~121-10호간

◯ 적용방법 : DSL공법-환경신기술434호

(건증기 히팅장치를 이용한 건증기 공급 보일러시스템과 홈과 단차를 가진 라바밴드 체결방식의 상수도관 갱생공법)

◯ 도급자 : ㈜탄탄컨스텍 대표 소영복

▢ 주요 공사 일정

◯ 작업구 가시설 설치 : 11.26. ~ 11.27일

◯ 관절단 : 11.29일 00:00 ~ 09:00(밸브조절)

◯ 세정 : 11.29. ~ 12.01일(밸브조절)

◯ 반전 및 갱생 : 12.02일 18:00 ~ 익일 09:00(배수과 현장 점검)

◯ 평가위원 참관 : 12.03일

◯ 관접합, 가시설 해체 및 포장 : 12.04~12.05일

▢ 행정사항

◯ 위와 같이 시험시공에 따른 밸브 조절 및 본부 배수과 점검과 관련하여 현장 근무 직원에 대하여 아래와 같이 초과근무 및 대체휴무제를 시행코자 합니다.

▢ 현장근무

◯ 근무시간 : 2014.11.29(토) 00:00 ~ 09:00(밸브조절)

2014.12.02.(화) 18:00 ~ 익일 09:00(시험시공 참관 준비 및 안내)

◯ 작업내용

- 수계변경에 따른 밸브조절 및 시험시공 참관 준비에 따른 현장관리 감독 및 급수 공급 업무

연번	성명	근무명령			비고
		근무시간	하여야 할 일	처리 기한
1	최세명	11.29(토) 00:00~09:00	공사관리 감독 및 지휘		초과근무
2	박경조	11.29(토) 00:00~09:00	제수밸브 조절 관련 업무처리		초과근무
3	조영진	11.29(토) 00:00~09:00	제수밸브 조절 관련 업무처리		대체휴무
4	최재영	12.2(화) 18:00~23:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		초과근무
5	김대용	12.2(화) 18:00~23:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		초과근무
6	최세명	12.2(화) 18:00~23:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		초과근무
7	최재영	12.3(수) 00:00~09:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		대체휴무 또는 초과근무
8	김대용	12.3(수) 00:00~09:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		대체휴무 또는 초과근무
9	최세명	12.3(수) 00:00~09:00	시험시공 참관 관련 공사관리 감독 및 지휘		대체휴무 또는 초과근무

* 대체휴무는 2014.12.31.일까지 시행.  끝.