문서번호	시설보수과-4560
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이민호		김호규	11/28 박용선
협 조

Bridge 창의뱅크

『성내교 보수공사』

현장 실정사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

동 부 도 로 사 업 소

시 설 보 수 과

현장실정 검토보고(성내교 보수공사)

우리과에서 시행중인 「천호지하차도 보수공사」와 관련하여 교좌받침 콘크리트 규격변경와 설계도서 상호 불일치 및 누락공종에 따른 현장 실정보고서가 제출되어 검토하고 보고드림.

	Ⅰ	공 사 개 요

○ 공 사 명 : 성내교 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 10. 31 ~ 12. 31

○ 공사개요 : 받침교체 90개소, 표면보수 162㎡, 단면보수 126㎡

○ 공 사 비 : 금439,479,700원(도급비:332,604천원, 관급비107,145천원)

○ 도 급 자 : ㈜선우씨앤드에이건설 대표 정 우 금

○ 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단

○ 관련근거 : 현장실정보고서 제출(공사감독1처-12744호(2014.11.28))

	Ⅱ	실정 보고사항

○ 설계도서 검토결과 설계도서 상호 불일치 및 누락공종에 대하여 추가 반영이 필요하며, 수량 증․감이 발생된 공종에 대하여도 수량조정이 필요함.

○ 설계도면에 교좌받침 콘크리트 규격이 800mm×850mm로 되어 있으나, 교량인상을 위한 유압잭을 설치하니 유압잭의 간섭으로 당초규격으로 교좌받침 시공이 불가한 상황으로 부득이 규격을 1,000mm×600mm으로 변경 시공하여야 하는 상황임.

※ 구조검토결과 교좌받침 규격을 변경 시공하여도 구조적으로 안전성을 확보할수 있다는 구조전문가의 검토의견서 첨부

	Ⅲ	조 치 의 견

○ 현장여건에 따른 교좌받침 콘크리트 규격 변경(800×850→1,000×600)에 대해 변경 시공하고 에폭시 주입등 누락공종 및 수량증감사항에 대해서는 추후 설계변경에 반영토록 시설관리공단에 통보코자 함.

- 개략공사비 증14백만원

붙  임 1. 공사실정보고서(공단) 1부.

2. 구조검토서 1부.  끝.