투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생계획과장)
(경유)
제 목	잡수입고지서(지연배상금) 발급분 감액 요청

1. 물재생계획과-15150(2014.11.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 발주한【분뇨농축기동 탈취설비 제작구매 설치】건의 기 발급한 잡수입고지서 금액을 감액 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약사항

- 계약서 납품기한 : 2014.10.11.(토)

- 업  체 납품기한 : 2014.10.13.(월)

- 검  수  일  자 : 2014.11.21.(금)

- 지연배상 일수 : 39일

나. 지연배상금 감액내역

건 명	지체일수		지연배상금			감액사유
	당초	변경	당초	변경	감액
분뇨농축기동 탈취설비 제작구매 설치	41일	39일	2,595,300원	2,468,700원	126,600원	납품기한 만료일이 휴일이므로 최초 지연배상일에서 휴일 2일 제외

끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	강희석		관리과장	11/28 김웅남
협조자
시행	관리과-11223	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 관리과	/
전화	02-300-8512	/전송	02-300-8518	/	rkd2030@seoul.go.kr	/	대시민공개