문서번호	토목부-23558
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		최광무	11/28 노우성
협조

설계도서 검토 결과보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부 )

설계도서 검토 결과보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

본 공사 감리업무를 수행중인 책임감리단으로부터 제출된 설계도서 검토결과를 설계변경시 반영하고자 보고하는 내용임.

공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

○ 공사규모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km

○ 공사기간 : 2010. 9.29. ~ 2015.12.30.

○ 공 사 비 : 10,549백만원

○ 도 급 자 : 보훈종합건설(주)

○ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

관련근거

○ 건설기술 진흥법 제48조 (설계도서의 작성 등)

제48조(설계도서의 작성 등)

① 설계 업무를 수행하는 건설기술용역업자는 설계도서를 작성하여 해당 건설공사에 대한 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술용역업자, 건설업자 또는 주택건설등록업자에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 설계도서를 제출받은 건설기술용역업자, 건설업자 또는 주택건설등록업자는 해당 건설공사를 시공하기 전에 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고하여야 한다.

○ 책임감리 현장참여자 업무 지침서  제8조 (설계서 등의 검토)

주요 보고 내용

구        분

주    요    변    경    사    항

1

흙운반거리(덤프운반) 변경

흙운반(덤프)이 가족길 보상 지연으로 본선을 이용한 토량 운반이 불가하여 운반 경로 일부 변경

※ 덤프운반거리 변경 : 352.3m → 590m, 560m

2

종배수관 설치

[STA.NO.0+500~620(우)]

배수관의 일부를 구거(사유지)로 방류토록 설계되어 배수계획 변경

※ 횡배수관 종배수관(Φ1200mm) : 0m → 120m

U형개거(1.0*0.9) : 78m→68m, 집수정 : 3개소 신설

3

수로암거 뒷채움재 변경

(STA.NO.0+409.62)

수로암거 피토고(1.0~2.0m, 기준 : 3.5m) 부족에 따른 구조물 안정성 확보를 위하여 뒷채움 재료 변경

※ 되메우기(토사1,550㎥) → 되메우기(혼합골재 1,550㎥)

4

배수관 규격 변경

(메이필드호텔구간)

메이필드호텔에서 유입되는 배수관 규격(Ø800mm → Ø1,200mm) 확인되어 배수관 규격 변경

※ 횡배수관(Ø1,000mm : 46m→0m, Ø1,200mm : 0m→39m)

종배수관(Ø1,000mm  : 104m→0m, Ø1,200mm : 0m→104m)

우수관  (Ø1,000mm : 140m→0m, Ø1,200mm : 0m→140m)

5

우수관로(Φ1200) 기존 수로암거 반영

도로개설로 신설되는 우수관을 공사시점의 기존 수로암거(오정로)로의 연결에 따른 일부 공종 누락

※ 굴착복구 : 0㎡→87㎡,  기존박스 천공: 0개소→1개소,        기존박스 관로접합 : 0㎥→0.29㎥

6

우수받이 스틸그레이팅 규격 및 수량 오류

우수받이 스틸그레이팅의 규격 및 수량이 설계도면, 수량산출서 및 내역서와 상이하여 설계도면으로 적용

※ 스틸그레이팅(495×395×50, 293개소)

→ 스틸그레이팅(900×400×75, 145개소)

7

아스팔트(유제) 자재비 누락 반영

아스팔트 유제의 자재비 누락

※ 아스팔트 유제 : 0D/M  →  492D/M

8

포장공법 변경 적용

(한국형포장 적용)

한국형 도로포장 설계법에 의한 포장 설계 반영

※ 아스콘 포장 및 토공 수량 변경

구 분	포 장 두 께	수 량 변 경(㎥)	증 감(㎥)
아스콘표층	5cm → 5cm	-	-
아스콘중간층	6cm → 6cm	-	-
아스콘기층	14cm → 14cm	-	-
보 조 기 층	32cm → 20cm	14,964→10,515	감4,449
동상방지층	28cm → 0cm	11,688→ 0	감11,688
소 계	85cm → 45cm
흙 깍 기		85,842→74,223	감11,619
순 성 토		51,402→69,294	17,892

9

폐기물 적사비 및 처리비 반영

콘크리트깨기 물량 처리 방법 변경(성토재로 유용 → 폐기물 처리)

※ 콘크리트깨기 : 0㎥→50㎥, 폐콘 적사비 : 0Ton → 5,497Ton

10

보행자 보호용 가림막휀스 설치

기존 보도 이용자(부천시 봉오대로 - 공사종점)의 보행자 안전 확보를 위한 안전휀스(가림형) 설치 반영

※ 가림형 휀스(12개월) : 0m → 330m,

11

기타 수량 누락 및 수량 표기 오류 반영

레미콘(25-21-8) 집계표상 수량 오기 정정

흄관(D600, D1200) 집계 수량 오기 정정

맹암거 자갈채움 수량 누락, 횡배수관 단면 및 수량 수정

보강토옹벽  자갈채움수정, 품질관리비 수정

지반조사 : 1공 → 3공, 토류판 손율 : 3개월 → 12개월

우수받이 연결관 도면 수량 적용

감리단 검토의견

○ 본 공사의 계약상대자로부터 제출된 설계도서 검토 의견에 대하여 검토 결과(설계사, 기술지원감리원, 감리원)를 설계변경에 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

○  수량변경 내역

구 분		규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
1.토공	1.05.흙깍기	토사깍기	M3	85,842	74,223	△11,619
	1.06.흙운반
	b-1.도쟈운반	토사 L=47.7m	M3	1,925	1,591	△334
	c-1.덤프운반	토사 L=352.3m	M3	77,458	71,038	△6,420
	c-2.덤프운반	토사 L=237.7m,현장	M3	0	71,038	71,038
	c-2.덤프운반	토사 L=560m,2차포장	M3	0	4,813	4,813
	1.07.순쌓기	노상	M3	51,402	69,294	17,892
	1.08.흙쌓기	노상	M3	119,875	127,987	8,112
2.비탈면 안전공	2.01.식생보호공
	a-1.Seed Spray	성토부	M2	14,594	15,824	1,230
	a-2.Seed Spray	절토부	M2	3,332	3,654	322
3.배수공	3.02.측구공
	a.V형측구(TYPE-1)	H=0.45M	M	1,258	1,283	25
	d.U형개거	1.0×0.9	M	266	256	△10
	3.04.횡배수관공
	a.횡배수관부설	VR관,D1000	M	125	84	△41
	b.횡배수관부설	VR관,D1000	M	5	0	△5
	c.횡배수관부설	VR관,D1200	M	48	87	39
	3.05.우수관공
	a.우수관부설	Φ450	M	1,140	1,155	15
	a.우수관부설	Φ600	M	370	300	△70
	a.우수관부설	Φ800	M	762	762	0
	a.우수관부설	Φ1000	M	140	0	△140
	a.우수관부설	Φ1200	M	0	140	140
	3.06.종배수관및면벽
	a-1.종배수관부설	Φ800	M	144	40	△104
	a-2.종배수관부설	Φ1200	M	21	244	223
	a-3.종배수관부설	Φ600	M	0	90	90
	3.09.우수받이및연결관
	c.스틸그레이팅	495×395×50MM	EA	293	0	△293
	c-2.스틸그레이팅	900×400×75MM	EA	0	145	145
	d.우수받이연결관부설	Φ300	M	360	606	246
4.구조물공	가족길교
	4.1.06.철근가공조립
	b.철근가공조립	보통	TON	16.475	20.369	3.894
	c.철근가공조립	복잡	TON	80.451	76.557	△3.894
	4.1.27.가시설공
	a.H-PILE공
	a-4.토류판설치철거	T=10cm,3개월	M2	867	0	△867
	a-5.토류판설치철거	T=10cm,12개월	M2	0	867	867
	4.1.30.자재대
	c.속채움,뒤채움재	혼합골재,Φ40	M3	0	43	43
5.포장공	5.01.동상방지층	T=56cm	M3	11,688	0	△11,688
	5.02.보조기층		M3	14,964	10,515	△4,449
	5.07.아스콘표층		M2	42,029	42,166	137
	5.11.사급자재대
	d.보조기층재	혼합골재,Φ40	M3	14,985	13,946	△1,039
	e.보조기층재	순환골재,Φ40	M3	4,252	4,648	396
	f.동상방지층재	혼합,순환골재,Φ40	M3	15,025	0	△15,025
	j.아스팔트	RSC-4(택코팅)	D/M	0	158	158
		RSC-3(프라임팅)		0	334	334
	k.잡석		M3	0	408	408
6.부대공	6.09.환경관리비
	e.폐기물적사비	폐콘크리트	TON	3,568	9,064	5,496
	e.폐기물적사비	폐아스콘	TON	1,034	1,297	263
	6.11.품질관리비
	가.품질시험비	레미콘	회	38	43	5
	6.21.시공중토질조사비		개소	1	3	2
	6.23.고재대		TON	2.895	1.732	△1.163
	6.24.기존박스 연결	시점부	개소	0	1	1
	6.25.가림막휀스
	a.가림막휀스	보행자보호용,12개월	M	0	330	330
	c.가림막휀스설치철거	보행자보호용	M	0	330	330

○ 공사비 증감  내역

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증·△감	비 고
1. 토공	531,224	627,068	95,844
2. 비탈면안정공	48,896	56,175	7,279
3. 배수공	461,349	503,819	42,470
4. 구조물공	69,966	89,821	19,855
5. 포장공	576,314	458,177	△118,137
6. 부대공	72,097	149,871	77,774
직접공사비(1)	1,759,846	1,884,931	125,085
간접공사비(2)	764,224	831,739	67,515	부가세포함
도급액(3=1+2)	2,524,070	2,716,670	192,600
관급자재대(4)	2,884,100	2,943,200	59,100
총공사비(5=3+4)	5,408,170	5,659,870	251,700
폐기물처리용역(6)	283,052	398,570	115,518
합계(7=5+6)	5,691,222	6,058,440	367,218

※ 신규 단가 협의율 적용 : 92.75% (낙찰률 85.515%)

조치의견

○ 상기와 같이 감리단에서 제출한 설계도서 검토 결과에 대하여 원활한 공사 시행을 위하여 우선 시공토록 승인하고,

○ 향후 본부 설계변경자문회의 심의 결과를 설계변경시 반영하여 공사 시행 및 건설폐기물 처리에 철저를 기하고자 합니다.

붙  임 : 1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 주요 공종별 세부 검토서 1부.  끝.