문서번호	도시철도설비부-10935
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		이용기	11/28 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사』 설계변경(제2회) 자문회의 심의요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시철도설비부

『서울지하철 9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사』

설계변경(제2회) 자문회의 심의요청 검토보고

지하철 9호선 연장건설 정보통신설비공사 시행중 설계변경사항에 대한 심의    보고 자료를 검토하고 그결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

사업개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선연장건설 정보통신설비공사

❍ 시 공 사 : 대선이엔씨(주) 대표 최승재

❍ 공사규모 : 본선((광·동)케이블 설치 17Km, 5개정거장 배선 145km

❍ 계약금액

구 분		계약금액(원)	계약 기 간	비 고
공 사 비		4,670,024,000	2012. 12. 26 ～ 2015. 03. 31
차수	1차	3,500,000,000	2012. 12. 26 ～ 2014. 01. 14	‘12.12.18 준공
	2차	580,596,000	2013. 10. 29 ～ 2014. 12. 31	‘14.11.18 준공
	3차	589,428,000	2014. 04 11 ～ 2015. 03. 31

❍ 감 리 자 : 책임감리 벽산파워(주) (통신분야 : ㈜안세기술)

Ⅱ		설계변경

추진경위

❍ 도시철도설비부-9686(‘13.12.18)  : 음성유도기 전원관련 업무지시

❍ 도시철도설비부-5142(‘14.06.08)  : 통합역무실이전외3건 관련 업무지시

❍ 서지9-2시감제14-376(‘14.08.18) : 임대상가 신설 실정보고서 검토보고

관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 공사계약일반조건(안행부 예규 제404호)제6절(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

설계변경 발생 주요사유

번호	내 용	설계변경 사유
1	음성유도기용 전원 케이블 신설 및 음성유도기 수량변경	- 음성유도기 전원케이블 누락에 따른 배관, 배선 반영 및 정거장 건축구조 변경에 따른 음성유도기 수량 변경(감)
2	가. T/F사무실 신설	- T/F 사무실 신설에 따른 통신설비 신설
	나. 927정거장 통합역무실 이전	- 927정거장 역무실 장소 변경(발매기실→통합역무실)에 따른 케이블길이 증가
	다. 환승E/V AFC 신설	- 927정거장 환승 E/V용 게이트 신설에 따른 배관배선 신설
	라. 종합운동장역 MIS 이설	- 2호선종합운동장역 대합실 건축구조 변경에 따른 MIS장비 이설
3	임대상가 신설	- 정거장 수익시설 확충계획에 따른 신설 임대상가에 대한 전화, 인터넷, TV공시청 설비 및 배관, 배선 신설

주요 변경사항

NO	공 정	주요 설계변경 내용				공사비(직접비)			비고
		품 명	당초	변경	증감	당초	변경	증감
1	일반통신 설비	음성유도기 HIV1.5mm 후강전선관	181 0 0	174 10,314 3,248	-7 10,314 3,248	57,950,951 0 0	55,709,754 85,971,052	-2,241,197 85,971,052	증
		소 계				63,298,895	145,691,765	82,392,870
2 (가)	일반통신 설비	케이블,전선 후강전선관 IDF단자함	0 0 0	220 38 1	220 38 1	0	2,027,844	2,027,844	증
2 (나)	일반통신 자동방송 정거장영상 행선안내 TV공시청 종합무선 출입통제 자동요금징수	케이블,전선 “ “ “ “ “ “ “	889 227 226 5,264 173 172 314 2,362	1,462 407 346 6,824 113 112 494 5,362	573 180 120 1,560 60 60 180 3,023	4,328,370 1,290,156 659,242 25,592,401 402,958 1,189,104 914,480 11,420,716	18,541,513 3,139,153 1,009,282 33,177,121 616,918 1,826,124 1,439,540 20,701,024	14,213,143 1,848,997 350,040 7,584,720 213,960 637,020 525,060 9,289,308	증
		소 계				45,797,427	80,459,675	34,662,428

NO	공 정	주요 설계변경 내용				공사비(직접비)			비고
		품 명	당초	변경	증감	당초	변경	증감
2 (다)	자동요금징수설비	케이블및전선 후강전선관	0 0	1,103 355	1,103 355	0	10,489,575	10,489,575	증
2 (라)	종합운동장역	케이블,전선 MIS장비 이설	0 0	622 1	622 1	0	5,593,750	5,593,750	증
3	일반통신 자동방송 TV공시청	케이블,전선 후강전선관 케이블,전선 후강전선관 케이블,전선 후강전선관	0 0 0 0 0 0	1,120 809 10 7 872 500	1,120 809 10 7 872 500	0	30,759,309	30,759,309	증
합 계						109,096,322	275,021,918	165,925,596	증

단가 적용기준

공 정 별	단 가 적 용 기 준
1. 음성유도기 전원케이블 신설	- 기 계약단가(재료비,노무비) 적용
2-가. 927정거장 T/F상황실 통신설비 신설
2-나. 927정거장 통합역무실 이전	-신규물품(가요전선관, 70mm) ․ 재료비 : 물가정보, 물가자료 가격중 낮은가격에 낙찰율 적용 ․ 노무비 : 정보통신표준품셈 및 상반기 정부노임단가에 낙찰율 곱한금액 적용 - 기존물품 : 기 계약단가(재료비,노무비) 적용
2-다. 927정거장 환승E/V 게이트 신설	- 기 계약단가(재료비,노무비) 적용
2-라. 종합운동장역 MIS장비 이설	-신규물품(HUB 철거, 이설) ․ 노무비 : 정보통신표준품셈 및 상반기 정부노임단가에 낙찰율 곱한금액 적용 - 기존물품 : 기 계약단가(재료비,노무비) 적용
3. 임대상가 신설	- 기 계약단가(재료비,노무비) 적용

설계변경 검토금액

❍ 도급 금액 총괄

구 분		설 계 변 경 검 토 금 액			계약기간	비 고
		당 초	변 경	증․감
총차 공사비		4,670,024,000	4,840,024,000	증170,000,000	‘12.12.26~‘15.03.31
차수	1차	3,500,000,000	3,500,000,000		‘12.12.26~‘14.01.14	‘13.12.18준공
	2차	580,596,000	580,596,000		‘13.10.29~‘14.12.31	‘14.11.18준공
	3차	589,428,000	759,428,000	증170,000,000	‘14.10.29~‘15.03.31

❍ 공사비 원가계산 내역

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비	4,670,024,000	4,840,024,000	170,000,000
1) 공사비	4,595,776,000	4,765,776,000	170,000,000
- 재료비	1,045,253,586	1,071,218,264	25,964,678
- 노무비	2,511,187,015	2,665,004,065	153,817,050
- 경 비	519,746,681	490,705,893	29,040,788
- 간접비 (일반관리비,이윤,가설비)	519,588,718	538,847,778	19,259,060
2) 물가변동(1차)	74,248,000	74,248,000	0

Ⅲ		검 토 의 견

책임감리 검토의견 : 설계변경사유의 타당성, 물량 산출, 일위대가 적용의 적정성등을 검토한 결과 적정한 것으로 판단

❍ 계약단가(재료비, 노무비) 적용 여부등 검토결과 적정

❍ 신규물품은 재료비는 물가자료와 물가정보 가격중 낮은가격에 낙찰율 적용,  노임은 정부노임단가에 낙찰율(85.495%)곱한 금액 적용

Ⅳ		조치계획

설계변경 관련 책임감리단 검토 사항이 타당한 것으로 판단되어 우리본부 “설계변경 자문위원회 운영 기준 제6조”에 의거 소위원회를   개최하여 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함.

❍ 자문위원회(소위원회) 운영

구 분	자문위원회 운영 기준	비 고
자문대상	○ 1건당 3,000만원이상 10억 미만 증∙감액	증 170백만원
위원구성	○ 위원수 : 총 7~8명 - 위원장(1), 간사(1) 위원(5~6) - 위원(외부위원3~4, 내부위원2)	○ 위원수 : 총 8명 - 위원장(1), 간사(1) - 위원(외부위원4, 내부위원2) ※ 시스템분야(송변전) 공동 개최
	○ 위원장 : 분야별 업무담당 과장(5급) ○ 간 사 : 분야별 업무담당(6.7급) ○ 위 원 - 내부위원 : 6․ 7급 실무공무원 - 외부위원 : 감리단장 등 외부전문가	자문위원회 개최 2014년 12월 초
자문내용	○ 설계변경 사유의 적정성 ○ 단가적용 및 변경물량의 적정성 ○ 변경되는 공법의 적정성 등

❍ 심의위원 수당지급

- “지방자치단체 예산편성 기본지침”에 의거 위원수당 지급

- 위원회 참석 및 검토수당 지급(내부위원 미지급)

붙 임  1. 설계변경 자문 요청서 1부.

2. 설계변경(2회)자문회의 심의요청 1부. 끝.