문서번호	생태공원과-1717
결재일자	2013.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장		한강사업본부장
최승룡	이해룡	이용태		07/25 한국영
협 조	기획예산과장		이사형
	총무과장		김영기

『한강도심 생태공원 확충 조성사업 건설폐기물 처리용역』

발주계획 검토보고

2013. 7.

한강사업본부

(생태공원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『한강 도심 생태공원 확충 조성사업 건설폐기물 처리용역』

발 주 계 획 검 토 보 고

우리본부에서 추진하고 있는 『한강도심 생태공원 확충 조성사업 건설 폐기물 처리용역』에 대한 발주방법 등을 검토, 아래와 같이 사업시행에 만전을 기하고자 함

용역개요

용 역 명 : 한강도심 생태공원 확충 조성사업 건설 폐기물 처리용역

위    치 : 반포 한강공원(서래섬 및 송전탑 주변)

용역기간 : 2013.08. ~ 2015.07.

용 역 비 : 158,400천원(13년 50,050천원, 14년 108,350천원)

용역내용 : 건설폐기물 운반 및 처리 9,036톤(1차 2,862톤, 2차 6,174톤)

추진경위

2009.09.10 : 한강 생태공원 확충계획 수립(본부장 제998호)

2013.02.28 : 한강도심생태공원확충 조성사업 실시설계 완료

2013.07.22 : 한강도심생태공원확충 조성사업 계약

발주 및 사업비 집행계획

입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

입찰참가자격(건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조)

- 건설폐기물 수집·운반업과 중간처리업을 모두 득한 업체로 주된          영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 단, 자격 보완을 위하여 건설폐기물 수집·운반업 허가만 득한     업체는 서울특별시, 인천광역시, 경기도 지역의 건설폐기물        중간처리업체와 공동도급(분담이행방식) 가능

사업비 집행계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2013년도	2014년도	비 고
폐 기 물	158,400	50,050	108,350

향후계획

2013.07.29 : 용역 계약의뢰(재무과)

2013.08.15 : 계약 및 착공

2015.07.31 : 준공

붙임 : 설계서 1부.    끝.