의원 요구 자료 제출

시 행	치수과-2533
결재일자	2013.7.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		치수과장	시설부장	한강사업본부장		결재
권혁정		김상언	代김상언	07/25 한국영
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1562번, 곽재웅의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

곽재웅 의원( 도시계획관리위원회, 민주당)

□ 요구번호 : 1562번

- 옥수나들목 공사진행 일정, 상황 등

□ 옥수나들목 사업개요

○  공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수동) - 장기계속

○  위    치 : 성동구 옥수동 옥수역 인근

○  사업규모

- 보행자전용 나들목 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 69.8m

- 이중육갑문(수문) 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m

○ 사 업 비 : 4,495백만원 (공사비 3,493, 관급자재 852, 이설비 150)

○  사업기간 : 2013. 4. 19 ～ 2015. 9. 30

□ 2013.4월 공사 착수하여 옥수나들목 설치 공사 추진을 위해

○ 옥수역하부 철도부지(성동제설기지)와 두무개길(철도부지) 점용과 관련하여 한국철도공사, 한국철도시설공단, 성동구청 등과 협의 중에 있으며,

○ 옥수나들목 설치를 위해서는 제방 개착(철거 후 재설치)이 필요하여 우기 공사 시 제방 범람 등 안전성의 문제가 있어, 우기 이전 유관기관 협의를 완료하고, 금년 우기 이후(10월부터) 공사를 시행할 예정입니다.

□ 유관기관 협의는 원활히 진행중에 있으며, 옥수역나들목 설치사업은 정상추진중입니다. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 한강사업본부 (치 수 과)	담당사무관	김 상 언
	☎ 3780-0683	주무관	권 혁 정
	작 성 일 : 2013. 7. 25