투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	동부3공구 전면책임 감리용역 변경계약 의뢰(8차1회)

우리본부에서 시행중인 『동부간선도로확장공사(3공구) 전면책임감리용역』에 대하여 전면책임감리용역(8차) 준공기한 변경이 있어 아래와 같이 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동부간선도로확장공사(3공구) 전면책임감리용역(8차)

나. 용 역 비 : 8차 500,000천원             (전체3,615,500천원)

다. 공사기간 : 8차 2014. 1. 2.~2014.12.31. (전체2008. 2.15~2015.12.31.)

라. 용역업체 : 동부엔지니어링(주), 한국건설관리공사

마. 예산과목 : 광역교통시설특별회계,도로계획담당관,도로건설,광역도로건설,동부간선도로확장(녹천교~의정부시계),시설비 및 부대비, 감리비

바. 설계변경 내역 (8차1회)                                  (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
용 역 비	500,000	500,000	-
용역기간	14. 1. 2~14.12.31.	14. 1. 2.~14.12.12.	감19일

붙  임 : 1) 설계변경 방침서 1부.

2) 설계변경내역서(8차1회) 1부.

3) 합의각서 2부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		교량건설과장	이동훈		토목부장	12/01 노우성
협조자	주무관	장종환		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-23713	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	topseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개