문서번호	시설관리과-17862
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
연제관		김만재	12/01 김영훈
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2014년 수유1동외8개동 상수도공사 - 2차변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『2014년 수유1동외8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 시행중 시공물량 증·감이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 결과 보고함.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2014년 수유1동외8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 :  당초  D=13~300㎜,   L=1,491m

변경  D=13~300㎜,   L=1,761m

다. 공사기간 : 2014.05.07 ~ 2013.12.31.

(총공사 부기기간 : 2014.05.07. ~ 2015.06.30.)

라. 도 급 비 : 변동없음

(당초) ********************************

(변경) ********************************

바. 도 급 자 : ******************

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2014년 12월 01일(월) 10:00 ~ 10:30

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 위 원 장 : 시설6급 김만재

라. 심 의 자 : 시설6급 김창열, 시설7급 이문성, 시설7급 유광창

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동 (증·감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증,감(원)	비 고
도 급 비	***********	***********	-
공급가액	***********	***********	-
부 가 세	**********	**********	-

○ 신공종 및 시공물량 증,감에 따른 변경

- 물량 증가 : 아스팔트포장절단(100~150mm적용)외 118공종

- 물량 증가 : 콘크리트포장절단(100~150mm적용)외 175공종

○ 설계변경 계약물량 증감 현황

구 분	신규공종	증	감	합 계	비 고
계	12	119	176	307
토 공		23	19	42
부 설 공	6	45	74	125
구조물공	1	5	2	8
부 대 공		11	20	31
사급자재		35	55	90
포 장 공	5		6	11

5. 심 의 결 과

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 신규공종 발생유무 및 단가적용 타당성 : 타당함

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

라. 계약변동(증,감)물량 계약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 심의결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.