문서번호	배급수과-3811
결재일자	2013.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배급수과장	기술개발부장		상수도연구원장
송재승	김수영	최영준		07/30 박용상
협 조	총무과장		박명진
	주무관		유태석

본관 기계실 MCC반 교체 발주 계획

2013. 7.

상수도연구원

(배급수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

::: 사전 검토항목 작성 후 삭제하시기 바랍니다

사전 검토항목 작성안내

시민참여 고려사항	●	시민, 이해당사자, 전문가, 옴브즈만(시민 모니터링단) 등 참여 고려 여부 - 청책워크숍, 마실, 타운홀 미팅, 자문회의 개최 등
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통, 환경, 재해 영향평가 및 관련법령 검토 여부
	●	기타	:	▸고용효과 : 사업 추진에 따른 고용유발 효과 고려 유무
				▸노동인지 : 일자리 안정성, 임금․노동 조건 고려 유무
				▸균형인지 : 지역균형발전을 위한 사항 고려 유무
				▸홍 보 : 홍보대상 및 매체, 핵심 메시지 고려 유무
				▸취약계층 : 정책 수혜대상으로 취약계층 고려 유무
				▸성 인 지 : 성주류화 관점 반영 고려 유무
				▸장 애 인 : 정책 수혜대상으로 장애인 고려 유무
				▸디 자 인 : 디자인 관점 반영 고려 유무
				▸갈등발생 가능성 : 발생 가능한 갈등에 대한 사전 고려 유무
				▸유지관리 비용 : 정책실행 후 유지관리 비용 고려 유무
타자원의 활용	●	중앙부처(국토해양부, 경찰 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 기업 등의 인적 ․ 물적 자원 활용 여부
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관(국토해양부, 타 지자체, 25개 자치구 및 이에 소속된 기관 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 시 산하기관(투자․출연 기관) 협의 유무

본관 기계실 MCC반 교체 발주 계획

장기간 사용으로 노후된 본관 기계실MCC반을 정비하여, 안정적인 전력공급으로 전기에너지 절약 및 효과적인 시설물 운영 ․ 관리하고자 실시하는 『본관 기계실 MCC반 교체』 사업에 대한 발주계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

❍ 총무과-6220(2013.7.23)호 『본관 기계실 MCC반 정비 의뢰』

❍ 재무회계과-563(2013.1.15)호 『2013년 계약심사 대상사업 알림』

□ 시설개요

❍ 시설명칭 : 본관 기계실 MCC반

❍ 시설현황

구 분	MCC-1	MCC-2	MCC-3	MCC-4	MCC-5
주용도	소화펌프용	배수펌프및배기휀용	사무실냉난방기 및 기타	SP	냉온수기용
제작사	두리계전(주)	두리계전(주)	두리계전(주)	두리계전(주)	동광계전(주)
설치년도	1998. 09				2002. 08

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 7. ~ 2013. 11.

❍ 위    치 : 본관 기계실

❍ 규    모 : 본관 기계실 MCC반 4면 개량

❍ 사업내용

- MCC반 4면 제작 설치

- 화장실내 다기능의 전자제품의 전원 제어반 설치

- 기타 부대공사 1식

□ 예산현황

❍ 총사업비 : 77,000천원

❍ 발주예산 : 71,049천원 (본부 설계심사 요청 금액)

❍ 예산절감 :  5,951천원

□ 발주방법

❍ 본부 및 본청 심사 후 자체발주

- 사유 : 우리시에서 자체계약이 가능한 사업은 조달발주를 지양(조달수수료 절감)함에 따라 예산절감을 위해 본부 기술검토 및 본청 계약심사과에 원가분석 의뢰 후 지명경쟁에 의한 자체발주 시행

- 관련근거

· 2013년도 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-560(2013.1.14)

· 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제22조 제10호

❍ 지명경쟁입찰 시 업체선정 기준

- 중소기업 제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 및 제9조에 의거 아래의 자격을 갖춘자를 한국전기공업협동조합으로부터 추천받아 지명경쟁 입찰

· 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법   시행령 제10조의 규정에 의한 “직접생산증명서” 보유 업체

· 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제15조에 의한 “고압 저압배전반 성능인증”을 획득한 업체

· 주된 영업소(본사)의 소재지가 “서울특별시”에 있는 업체

- 사유 : 본 사업은 중소기업자 간 경쟁제품을 구매하는 것으로 지정된 제품에 대해 직접생산이 가능한 중소기업자를 대상으로 입찰에 부쳐야 하며, 공인된 성능 확보와 원활한 A/S를 위하여 관련분야 성능인증 보유 및 서울특별시 소재업체로 입찰참가자격을 제한하고자 함.

□ 추진일정

❍ 2013. 7. 30. : 본부 계약심사(기술검토) 요청

❍ 2013. 7. 30. : 관련 조합에 업체 추천 요청

❍ 2013. 8. 12. : 본청 계약심사과(계약심사) 요청

❍ 2013. 8. 26. : 구매계약 발주

❍ 2013. 9. 10. : 계약 및 제작 착수

❍ 2013. 11. 20. : 설치 및 시운전 완료

붙임 : 원가계산서 1부.  끝.