투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(포장2구역 정산)

우리사업소에서 시행하는 『2014년 도로포장공사(2구역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공  사  명  : 2014년 도로포장공사(2구역)

나. 계약년월일 : 2014. 6. 3

다. 공 사 기 간 : 2014. 6. 12 ~ 2014. 12. 31

라. 도  급  자 : ㈜푸른건설  권미주

마. 설계변경내역

구 분		설계변경 금액(원)		증․감(원)	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,908,312,300	1,817,583,670	감) 90,728,630
도급비	공급가액	404,374,819	424,200,000	증) 19,825,181
	부 가 세	40,437,481	42,420,000	증) 1,982,519
	계	444,812,300	466,620,000	증) 21,807,700
관 급 비		1,450,252,730	1,337,716,400	감)112,536,330
이 전 비		13,247,270	13,247,270	0

바. 예산과목 : 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비.

따로붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 변경설계서 1부.  끝.

주무관	이화신		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	12/01 이승진
협조자	관리단속과장	정수현		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-10525	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913 (번동) 북부도로사업소 도로보수과	/
전화	944-5436	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개