함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(대영중학교외 23개소 아리수 직결음수대 설치공사)

우리사업소에서 시행중인 『대영중학교외 23개소 아리수 직결음수대 설치공사』 에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 대영중학교외 23개소 아리수 음수대 직결음수대 설치공사

나. 도 급 자 : ㈜경성씨이엔지  대표 송재호

다. 계약기간 : 2014. 09. 17. ~ 2014. 12. 15.

라. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생

마. 설계변경금액 및 차수별계약금액 변경내역

당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
23,031,980원	22,759,000원	272,980

바. 예산과목

ㆍ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대)

붙 임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의서 1부.

4. 합의서 1부. 끝.

주무관	한규수		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	12/01 우종근
협조자	주무관	代심숭금		주무관	이은옥
시행	시설관리과-27047	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개