문서번호	시설관리과-24834
보존기간	년
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	시설관리과장
권기섭	12/01 송근호
협 조

공사 실정보고에 따른 검토보고

(무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사)

2014. 12

강남수도사업소

공사 실정보고에 따른 검토보고

(무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는『무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사』와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 작업구 복공판 규격변경에 따른 현장 실정보고가 접수되어 이에 대한 검토 보고사항임.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사

○ 공사기간 : 2014.05.16.~2014.12.05

○ 도 급 액 : 1,915,960,020원

○ 공사개요 : D=900㎜, L=1,400m(비굴착갱생 SCSL공법)

○ 도 급 자 : ㈜라텍이엔지 대표 정재금

○ 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단(공사감독2처)

☐ 시설관리공단 실정보고 내용

○ 관련근거 : 공사감독2처-20431(‘14.11.27)

○ 복공판 규격변경

- 현    황 : 복공판 “강판25㎜ 야간”으로 설계

․ 강판설치 시 우천으로 인한 미끄러움으로 교통사고 발생 및 중차량 통과로 소음이 커 주변 아파트, 학교의 민원발생 우려됨

- 검토의견

․ 안전사고 및 민원 발생 방지를 위하여 복공판을 “강판25㎜ 야간”에서 “2000×750×200 야간”으로 변경 시공

․ 복공판 설치 철거 수량은 각 공종에 따른 실제 설치 · 철거 수량 적용

- 복공판 공사개요

․ 복공판 설치 · 철거(강판25㎜ 야간) 감255㎡

․ 복공판 설치 · 철거(2000×750×200 야간) 증1,257㎡

- 도 급 비 : 증 19,964천원

☐ 사업소 검토내용

○ 복공판 규격변경

- 시설공단의 검토내용과 같이 안전사고 및 민원발생 방지를 위하여 복공판을 “강판25㎜ 야간”에서 “2000×750×200 야간”으로 변경 시공한 후 추후 설계변경 시 반영 조치

․ 당초 : 강판25㎜ 야간(255㎡)

․ 변경 : 2000×750×200 야간(1,257㎡)

☐ 행정사항

○ 사업소 검토의견을 감독기관인 서울시시설관리공단에 통보

따로붙임 : 1. 시설공단 실정보고서 1부

2. 위치도 및 현장사진 1부

3. 강관부설도면 및 공기밸브 도면 1부.  끝.