문서번호	도로보수과-5319
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	12/01 代홍영두
협조

설계변경(2차) 검토 보고

[2014년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-1구역]

2014. 11.

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(2차) 검토 보고

하반기 추가 재배정 예산 집행과 강변역 진출입로 개선공사에서 발생하는 폐아스콘 및 폐콘크리트를 공기 및 행정력을 감안하여 부득이 물량 변경을 검토

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-1구역

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 및 처리 21,055톤

○ 계약금액 : 금218,878,000원

○ 계 약 자 : ㈜씨에스

○ 용역기간 : 2014. 4. 11. ~ 2015. 2. 28.

○ 공 정 률 : 85%

□ 보고내용

○ 폐아스콘량 증가

- 하반기 노후포장도로 정비공사 추가 재배정 예산 집행

- 강변역 진출입로 개선공사장 발생 폐아스콘 처리

○ 폐콘크리트 처리량 증가

- 제설재 야적장 신설공사와 강변역 진출입로 개선공사 발생 폐콘 증가

□ 변경내용

○ 공종별 수량

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
폐아스콘 운반	왕복, 주·야간	톤	19,205	28,700	증 9,495	폐콘크리트 포함
폐아스콘 처리		톤	21,055	28,650	증 7,595	직영 운반 포함
폐콘크리트 처리		톤	500	900	증 400

○ 도급비

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
계	218,878,000	327,393,000	증 108,515,000
1. 운반비	213,023,000	316,854,000	증 103,831,000
운반비	173,690,310	258,250,200	증 84,559,890
제경비	39,332,690	58,603,800	증 19,271,110
2. 처리비	5,855,000	10,539,000	증 4,684,000

□ 향후계획

○ 3차 기성 : 2014. 12.

○ 정산 및 준공 : 2015. 2.

첨  부 : 2차 변경내역서 1부.  끝.