문서번호	기전과-11025
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박정민		12/01 정윤식
협 조
	주무관		백윤광

『2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사』 현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2014. 12.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사(종합청사별관 외교통상부 앞) 추진중 책임감리사(도로교통공단)로부터 현장실정에 따른 기술검토의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치 계획을 보고함

▢ 관련근거

○ 2014. 09. 24  발주 계획 보고

○ 2014. 09. 24  공사 시행

○ 2014. 10. 23  공사 착공

○ 2014. 11. 03  통합지주 설치 협조요청

○ 2014. 11. 25  현장실정보고(도로교통공단)

▢ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사        (종합청사별관 외교통상부 앞)

○ 공사금액 : 금58,816,060원

○ 공사기간 : 2014. 10. 16 ~ 2015. 02. 28

○ 시공업체 : ㈜대호전력기술 대표 조진호

○ 공사위치 : 종로구 적석동 도렴교차로(종합청사별관 외교통상부 앞)

▢ 감리사 실정보고 내용 및 검토의견

번호	항목	현 재 상 황 및 문 제 점	감리사 검토의견	변경금액 (개략) (증‧ 감)	사업소 의견
1	제어기	∎ 표준형 제어기 완성품(3지형) 신설 : 1대(사급)로 되어있음	∎ 표준형 사급제어기를 3색등화 관급제어기로 변경 - 제어기 완성품(FRP) 신설 : 1대(관급) - 제어기 부분품(LSU) 신설 : 4EA - 제어기 부분품(EXT Flash) 신설 : 1EA ∎ 제어기 설치 위치 변경에 따른 보도굴착 물량 증가	감 493만원	적정
2	지주	∎ 디자인지주 외날개 통합 신설 : ∅250-1본, ∅200-1본 ∎ 디자인지주 외날개 신설 : ∅200-1본 ∎ 디자인지주 신설 : ∅150-2본	∎ 디자인지주 외날개 통합 신설 : ∅250-1본, ∅200-1본 ∎ 디자인지주 외날개 신설 : ∅250-1본, ∅200-1본으로 변경	감 9만원
3	신호선	∎ 표준형 제어기사용으로 신호별 신호선 각선 적용 배제	∎ 3색등화 제어기 사용에 따라 신호별 개별 신호선 적용으로 신호선 물량증가 ∎ 현장 조사결과 신호선 철거 물량 증가	증 646만원
4	전송선	∎ 전송선(0.65mm×5P)가공1선 신설 : 50M	∎ 전송선(0.65mm×5P)지중1선 신설 : 20M로 변경 ∎ 제어기 옆 통신맨홀이 있어 전송선 지중화 실시로 인한 지중화 물량 증가 및 가공물량 감소	감 10만원
5	전원선	∎ 전원선(6SQ×2C)가공1선 신설 : 50M	∎ 전원선(6SQ×2C)가공1선 신설 : 50M 적용 및 전원선(6SQ×2C)지중1선 신설로 지중화 물량 24M 증가	증 5만원

번호	항목	현 재 상 황 및 문 제 점	감리사 검토의견	변경금액 (개략) (증‧ 감)	사업소 의견
6	조가선	∎ 아연도강연선, 38SQ : 272m 적용되어 있음	∎ 유연성이 있는 조가선(와이어로프(6mm)) 237M 설치로 변경하여 유지보수 및 작업자의 안전을 고려함	증 14만원	적정
7	음향 신호기 기능 검사비	∎ 미반영 되어있음	∎ 음향신호기 기능검사비(4대) 반영	증 15만원
8	보험료	∎ 건강보험료, 연금보험료, 노인요양보험료 반영되어 있음	∎ 보험료 납부 증명자료 미제출에 따라 감액	감 69만원
9	간접비		∎ 정산에 따른 간접비 차액 발생	증 239만원

▢ 변경 금액

구 분	변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
공급가액	53,469,146	56,544,546	(증)3,075,400	-
부가가치세	5,346,914	5,654,454	(증) 307,540	-
총공사비	58,816,060	62,199,000	(증)3,382,940	-

○ 설계변경 사유 및 가용예산

- 설계도면과 현장여건과의 차이를 수정 보완하고 유관기관의 업무협조로 반영된 사항을 고려하여 설계 변경 필요

- 예산가용액

예산액	품의(발주)금액	계약금액	낙찰차액	이전비
66,915,000원	66,605,000원	58,181,060원	8,423,940원	310,000원

▢ 보고자 의견 및 조치사항

○ 책임감리사가 제출한 실정보고에 대해 검토한 결과 적합하여 위와 같이 작업을 추진토록 승인하고 낙찰차액 및 이전비를 활용하여 설계변경을 추진코자 함

붙임 : 실정보고(책임감리사) 서류 1부.  끝.