문서번호	행정관리과-8463
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
오병수		김형규	12/01 박기석
협 조
	정수과장			代조현태
	정수시설과장			안길찬
	원수관리과장			손주옥

고도정수처리시설

인수 추진반 구성·운영 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강북아리수정수센터

(행정관리과)

고도정수처리시설

인수 추진반 구성 ․ 운영 계획(안)

고도정수 처리시설공사의 준공이 다가옴에 따라 빈틈없는 인수로 향후 고도시설 운영에 차질이 없도록 분야별 인수 추진반을 구성하여 더 깨끗한 건강하고 맛있는 아리수를 시민께 공급하고자 구성함.

Ⅰ		추진의 필요성

○ 이상 없는 고도정수처리 시설 운영을 위하여 빈틈없는 인수 필요

○ 인수인계 목록에 의한 정확한 인수로 운영상 오류 사전방지

○ 향후 고도정수처리의 차질 없는 유지관리

II		고도정수처리시설 공사개요

○ 시설개요 : 720,000톤/일(장래 950,000톤/일)

○ 공사비 : 1,124억원

○ 공사기간 : 2010. 2. 18 ~ 2014. 12. 5(준공검사 예정일)

○ 시공사 : 대보건설(주)

○ 시설현황 : 중계펌프장, 오존접촉조, 활성탄 흡착지, 회수조

○ 시운전 기간 : 2014. 7. 1 ~ 10.31

○ 중점 진행 중 사항

- 기존 표준 수처리와 고도처리수의 분리 공급

- 오존 및 활성탄 흡착공정 부하운전 실시

- 제어실 운영요원 교육 실시

(감시제어시스템, 수배전반, MCC반, 계측기기류 등)

- 고도처리 유지관리 지침서 작성 및 준공 도서, 예비품목 인계인수

Ⅲ		인수 추진반 구성․운영(안)

□「고도정수 처리시설 인수 추진반」구성

○ 운영기간 : 2014. 12.  2 ~ 인수 종료시 까지

○ 구성인원 : 3개과 12명

□ 추진반 구성도

행정관리과 반장			정수과 반장			정수시설과 반장
과장 김형규			과장 임건혁			과장 안길찬
행정6급 김명한			화공6급 조현태			전기6급 양영민
전문경력관 이용우			화공7급 김석진			기계6급 이덕종
기계운영7급 김홍년			연구사 박석주			토목6급 김동우
※ 인수 물량 등 인수사항에 따라 추진반 반원의 추가, 변경 가능함.

□ 부서별 인수사항

부서명	인 수 사 항
행정관리과	재산, 방호, 소방관련 등 행정관리과 소관 전반
정 수 과	시운전 결과보고서, 계측기기 작동확인 등 정수과 소관 전반
정수시설과	전기, 기계, 자동제어, 통신설비, 토목, 건축 준공도서, 도면 시험성적서 필증 등 정수시설과 소관 전반

※ 상세한 인수사항은 추후 인수인계 목록과 대조하여 빠짐없이 인수확인

□ 주요 추진업무

인수인계 목록에 의한 빈틈없는 확인

○ 인수인계 목록과 대조하여 빠짐없는 인수확인 철저

○ 오류가 있는 사항은 보완 후 인수

○ 도면은 CD, USB, CAD 형태로도 받아 업무추진에 활용

Ⅳ		향후계획

○ 고도정수처리시설 인수 추진반 구성․운영 : 2014. 12. 2. ~

○ 인수 추진 : 2014. 12. 5. ~ 인수 마무리까지

- 각 분야별, 부서 소관별 인수인계 목록에 의한 확인 인수.

○ 인수받은 서류일체를 한 장소에 보관 관리

Ⅴ		행정사항

○「고도정수처리시설 인수 추진반」구성에 따른 회의장소 : 소회의실

○ 고도정수처리 인수서류 보관장소 확보.  끝.