문서번호	건축부-14357
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
박영동		신명승	12/01 김우성
협조
	도성보존팀장		신추교

“서울 한양도성 흥인지문, 광희문주변

단절된 성곽 연계성 회복공사” 발주시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(건   축   부)

“서울 한양도성 흥인지문, 광희문 주변

단절된 성곽 연계성 회복공사” 발주시행 계획

흥인지문 일대 등 단절된 성곽의 제 모습 회복을 위해 “서울 한양도성 흥인지문·광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사”를 시행하고자 함.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 서울 한양도성 흥인지문, 광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

○ 위    치 : 서울시 종로구 종로 288 흥인지문 일원외 1개소

○ 공사내용

- 성곽 복원공사 : 흥인지문 북측 21m 성곽, 지대석 및 여장공사

- 단절된 성곽 연계성 회복공사 : 흥인지문 양측, 광희문 북측 총 105.7m 바닥포장

- 기타 시설물 공사(조형물, 안내판 설치 등)

○ 총공사비 : 1,682,968,700원(폐기물 처리비 40,273,170원 별도)

○ 공사기간 : 2014.12.~2015.10(착공일로부터 10개월)

□ 추진경위

〈성곽 복원〉

○ '14.02.        동대문교회 철거

○ '14.03.~09.  발굴조사

○ '14.07.~09.  기본계획 용역 추진 (원형고증)

○ '14.09.~11.  실시설계 완료

〈단절된 성곽 연계성 회복〉

○ '14.04.       용역시행방침 결정

○ '14.06.~'15.02. 기본계획 및 실시설계 용역

○ '14.07.~11. 한양도성자문위원회 8회

○ ‘14.11.27    문화재청 설계협의

○ ‘14.12.02     계약심사

□ 소요예산

○ 예산현황                                                     (단위 : 천원)

구분	합계	서울한양도성 보수복원(국고보조)	서울한양도성 단절된 성곽구간 잇기사업(국고보조)
총계	1,896,508	497,638	1,398,870
시설비	1,849,708	494,538	1,355,170
감리비	40,000	0	40,000
시설부대비	6,800	3,100	3,700

□ 공사발주 계획

○ 입찰 및 계약방식

- 입찰방법 : 공개경쟁(긴급)

○ 입찰참가자격

-「문화재수리 등에 관한 법률시행령」제13조에 의거 종합문화재수리업(보수단청업)으로 등록한 업체로서 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 당해 자격을 유지한 자

- 당해 지역업체(서울특별시)의 최소 시공참여비율은 공사금액의 100분의 49이상이어야 함

- 공동 수급체 구성원 수는 대표사 포함 2개사 이내로 하며, 대표자는 출자비율의 비중이 높은 업체로 함

○ 현장설명 미실시

○ 낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사

○ 하자담보책임기간 : 「문화재수리 등에 관한 법률시행령」별표6(문화재수리의 종류별 하자담보책임 기간)에 의함

□ 공사기간 : 착공일로부터 10개월

□ 예산과목

○ 흥인지문 북측 성곽 복원

- 한양도성 보전관리 활용, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성보존정비, 서울 한양도성 보수·복원

○ 단절된 성곽 연계성 회복

- 한양도성 보전관리활용, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성보존정비, 서울 한양도성 단절된 성곽구간 잇기사업

※ 관련규정

- 긴급공고 : 「지방계약법」 제10조 및 시행령 제35조제4항

- 현장설명 미실시 : 「지방계약법시행령」 제15조 제3항

- 낙찰자결정방법 : ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준’ 제2장(안전행안부 예규 제73호, 2014.02.05.)

- 하자담보책임기간 : 「문화재수리 등에 관한 법률시행령」 제19조

□ 향후계획

○ 2014.12. 입찰공고

○ 2015.10. 공사완료

□ 기    타

○ 문화재청 설계승인 협의과정에서 공사비 및 공사내용 등 변동사항 발생시 향후 설계변경 등을 통해 계약변경 처리

따로붙임  1. 계약요청서 1부

2. 공사집행계획서 1부

3. 긴급입찰공고 사유서 1부

4. 내역서 1부

5. 계약심사결과 1부

6. 청렴계약이행서약서 1부. 끝.