문서번호	물재생과-6716
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	12/01 채희정
협 조

우수토실 악취저감 가림판 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

중랑물재생센터

[물재생과]

우수토실 악취저감 가림판 설치공사 시행

『복개하천 주변 악취방지공사』사업의 일환으로 차집관로 우수토실 노후 가림막 교체와 가림막 미 설치 우수토실에 대한 판넬 가림막을 설치하여 차집관로 우수토실의 악취를 저감하고자 함

Ⅰ		관련근거

서울시 물재생시설과-3686(2014.3.20.)호로 “복개하천 주변

악취방지공사” 예산확보 통보

Ⅱ		추진현황

2014. 3. : 서울시 물재생시설과 악취저감공사 예산확보 통보

2014. 9.  : 복개하천 주변내 악취실태 조사

2014.10.  : 악취방지공사 실시설계

Ⅲ		예산현황

금회 집행계획                                    (단위:백만원)

구 분	총예산액	사업개요	기집행액	금회집행계획	금 회 사업비
복개하천 주변 악취방지공사	1,729	중랑천 등 차집 관로 악취 저감시설 설치	161	U형차집관로 덮개설치:900m	239

잔여예산 계획: 1,329백만원

○ 면목천 복개말단부 악취저감시설 설치공사 : 240백만원

○ #3,4처리장 침사진, 초침 및 포기조 악취저감시설 : 1,089백만원

Ⅳ		공사 시행계획

금회 공사계획

○ 공 사 명 : 차집관로 우수토실 악취저감판넬 설치공사

○ 공사발주 : 2014. 12월

○ 공 사 비 : 239,000천원

○ 공사규모 : 중랑천 등 16개소 우수토실 316㎡

○ 공사내용 : 차집관로 우수토실 악취차단 판넬설치

- 부식방지 알루미늄 판넬로 우수토실 밀폐공사

공사입찰 및 입찰참가자격

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법시행령 제7조에 의거 상.하수도설비공사업으로 등록된 업체로

주된 영업소가 서울특별시 소재업체

Ⅳ		향후계획

2014.12.02 : 서울시 예산배정 요청

2014.12.04 : 공사발주

첨부  1. 공사 위치도 1부.

2. 설계서 1부.   끝.