문서번호	물재생과-6719
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	12/01 채희정
협조

설계용역 준공기한 연기보고

[2처리장 유량조정 및 침전조 설치 기본,실시설계용역]

2014. 12.

중랑물재생센터

[물재생과]

설계용역 준공기한 연기보고

우리센터에서 추진중에 있는『2처리장 유량조정 및 침전조 기본, 실시 설계용역』을 시행중 설계자문회의 결과 설계에 대한 자료검토 등의 용역 기간의 절대공기가 부족하다고 판단하여 준공기한을 연기하고자 함

용역개요

❍ 용 역 명 : 제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사 기본 및 실시설계용역

❍ 용역개요 : 유량조정 및 침전조설치 V= 2,200㎥

❍ 용역기간 : 2014.09.24.~2014.12.08.

❍ 용 역 비 : 69,102천원

❍ 용 역 사 : ㈜경보기술단, 녹원종합기술(주)

준공기한 연기

❍ 사  유

- 당초 설계용역 발주시 연내 공사착공을 목표로 계획하여 용역기한을 75일로 산정하였으나, 설계 진행과정의 조사,검토에 대한 설계용역 절대공기가 부족한 실정이고, 용역자문결과 자문위원들의 자문의견 반영, 검토 등의 추가사항 발생 등으로 60일간의  용역기한 연기를 통하여 용역시행에 철저를 기하고자 함

❍ 연기 기한

- 당 초 : 2014.12.08

- 변 경 : 2015.02.06

❍ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 90조

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 본 설계용역의 내실을 기하고자 위와 같이  준공기한을 연기하고자 함.  끝.