문서번호	도로보수과-10520
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	12/01 이승진

설계변경 시행계획(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)」

설계변경 시행계획(제1회)

「2014년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역」 시행중 현장여건에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

1. 용역현황

○ 용 역 명 : 2014년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-북부

○ 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 7,000톤(긴급복구, 직영포장)

○ 용 역 비 : 40,602,000원

○ 용역기간 : ‘14.04.16 ~ ’15.02.28

○ 도 급 자 : ㈜씨.예스  대표 최상준

2. 설계변경 사유

○ ‘14년 하반기 예산 추가 재배정 관련 정비물량 증가로 인한 폐아스콘 증량 및 신규공종 추가(폐아스콘 운반 및 처리 : 총 10,439톤)

⇒ 긴급복구비 예산배정(2차, 620백만원)[도로관리과-10943(‘14.7.18)]

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총용역비	40,602,000	78,810,000	증)38,208,000
공급가액	36,910,909	71,645,455	증)34,734,546
부가가치세	3,691,091	7,164,545	증)3,473,454

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 하반기 추가재배정 예산 사용 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임  변경내역서 1부. 끝.