문서번호	방재시설부-12500
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	12/01 代서관석
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토출수문 설치구간 가배수로 설치에 따른 검토보고

2014. 12

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토출수문 설치구간 가배수로 설치에 따른 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 토출수문 설치구간에 기존 배수관로가 저촉되어 토출수문설치시까지 가배수로 설치에 대한 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 공사실정보고(공릉2빗물펌프장 가설배수관로 설치)

- 공사감독2처-20262(2014.11.26.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,541백만원

보고내용

❍ 공릉2빗물펌프장 토출수문 신설위치에 기존배수관로(ø800㎜)가 저촉되어   토출수문건설 완료시까지 임시 가배수관로 설치가 필요한 실정임

- 소요공사비 및 공사개요

․ 소요공사비 : 9,449천원

․ 공사개요

구 분	관 종	관 경	연 장	비고
가설배수관로	PE이중벽관	Ø800mm	38m

- 가배수관로 설치위치

가배수관로 설치위치

감리검토내용

❍ 상기와 같이 기존 배수관로가 유출수문에 저촉됨에 따라 유출수문 완료시까지 가설배수관로(물돌리기)를 부설함이 타당하다고 사료됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 공사비 산출서 1부. 끝.